문서번호	임대주택과-13172
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		임대주택과장	주택건축국장
박성재		임인구	10/30 정유승
협 조
	법제심사팀장			최승호
	신문팀장			유재명
	임대사업팀장			김승수

도시계획시설사업 실시계획(3차변경) 인가 및 고시

2015.10

임대주택과

도시계획시설사업 실시계획(3차변경) 인가 및 고시

중구 만리동2가 218-105 일대 도시계획도로와 관련 옹벽 사용, 부지 기부채납 준비 등을 위해 만리제2재개발조합으로부터 사업계획 변경 요청이 있어 준공예정일을 연기하고 실시계획을 변경 인가 및 고시하고자 함

□ 사업 개요

○ 사업명: 만리2주택재개발구역 외 도로(소로3-000호) 신설공사

○ 종  류: 도시계획시설(도로) 사업

○ 위  치: 중구 만리동2가 218-105번지 일원

- 시점 : 중구 만리동2가 218-105번지

- 종점 : 마포구 아현동 87-6

○ 면적 및 규모: 948.2㎡ (B=6m, L=129m)

□ 실시계획 변경

○ 사  유: 준공 전 조치사항 처리를 위해 사업계획 및 준공예정일 변경

- 만리제2재개발구역 내 옹벽 사용(조합 동의)에 따른 실시계획 내용 변경

- 시설물 점검 시 지적사항에 대한 조치를 위한 기간 필요

○ 변경 내용

① 사업계획: 사용할 토지 및 시설물(옹벽) 새로 추가

- 준공 후 도로 및 시설물(구조물)의 보수 및 유지 관리를 위해 재개발 부지 내 옹벽 및 도로부지의 무상사용 (만리제2재개발조합 동의서 첨부)

② 준공예정일: 당초: 2015년 10월 30일 → 변경: 2016년 01월 31일

□ 처리 방안

○ 실시계획을 변경 인가하고 관련규정에 따라 시보에 고시

붙임 : 1. 고시문 - 1부

2. 만리제2주택재개발정비사업조합 협의 공문 - 1부.  끝.