문서번호	설비부-5710
결재일자	2015.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
박경철	임현근	전결 05/14 박기형

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05.

도시기반시설본부

설비부

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기검토 보고

『돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사』와 관련하여 관급자재 납품기한 연기를 위한 검토사항을 보고드림

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 돈화문 국악예술당 건립 기계설비공사

❍ 공사규모 : 지상1층/지하3층(연면적:1,800㎡) 기계 및 소화설비공사 1식

❍ 공사기간 : 2013. 12. 23. ~ 2015.  6. 22.

❍ 공사금액 : 706백만원(1차:100백만원, 2차:100백만원)

❍ 시 공 사 :  ㈜일성이엔지-기계, 대월기전(주)-소방

❍ 감 리 단 : ㈜영화키스톤건축사사무소

2		관 련 근 거

❍ ㈜영화키스톤건축사사무소 돈화문감 제15-37호(2015.05.13.)

- 지열히트펌프시스템 구매설치 외 1건 납품기한 연기 요청

3		관급자재 구매현황

자 재 명	수 량	계약업체	계약금액(천원)	납품기한	비 고
자동제어	1식	로지시스템㈜	152,020	’15.05.22.
지열히트펌프시스템	1식	가진기업㈜	190,800	’15.05.30.

4		검토 보고내용

❍ 납품기한 연기내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
자동제어	12142178700	로지시스템㈜	152,020,000	’15.05.22.	’15.10.16.	(147일)
지열히트펌프시스템	12142178700	가진기업㈜	190,800,000	’15.05.30.	’15.10.16.	(139일)

❍ 연기 사유

- 선행공종(토목공사) 지연에 따른 관급자재 납품시기 미도래

❍ 지체상금 부과 여부 : 미부과

❍ 감리단 검토의견

- 선행공종(토목공사) 지연 및 타공종 진행 등을 고려한 납품업체의 납기연기

요청내용이 적정하다고 판단됨.

5		보고자 의견

❍ 감리단의 검토보고 내용이 적정하다고 판단되므로, 현장 여건에 맞게  적기에 납품될 수 있도록 납품기한을 연기 조치하고자 함.

따로붙임 : 관급자재 납품기한 연기관련 문서 1부.  끝.