투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(돈화문국악예술당건립 기계설비공사)

1. 설비부-5710(2015.5.14.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인『돈화문 국악예술당건립 기계설비공사』에 소요되는

관급자재에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기내용

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약업체	계약금액 (원)	납품기한		비 고
				당 초	변 경
자동제어	12142178700	로지시스템㈜	152,020,000	’15.05.22.	’15.10.16.	(147일)
지열히트펌프시스템	12142178700	가진기업㈜	190,800,000	’15.05.30.	’15.10.16.	(139일)

나. 연기 사유 : 선행공종 지연에 따른 납품 시기 미도래

다. 납품연기 귀책사유  : 본부

라. 지체상금 부과 여부 : 미부과

따로붙임  납품기한 연기관련 문서(합의각서 포함) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박경철		시책사업과장	임현근		설비부장	05/14 박기형
협조자
시행	설비부-5756	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동96) 프리미어 플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	대시민공개