문서번호	생태공원과-2636
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
임이환		최병언	11/02 장상규
협조

『양화한강공원 친수공간 조성』

전기안전관리 대행용역 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

생태공원과

『양화한강공원 친수공간 조성』

전기안전관리 대행용역 변경보고

우리과에서 추진중인 양화한강공원 물놀이장(특고압수전) 전기안관리대행 용역계약과 관련하여 현장여건 변동에 따른 계약변경을 시행코자 함.

Ⅰ		법 적 근 거

전기사업법 제73조(전기안전관리자의 선임 등)

전기사업법시행규칙 제45조(전기안전관리자의 선임)

- 주요임무 : 전기설비의 유지관리 및 운영에 관한 안전관리업무 전반 수행

Ⅱ		시 설 규 모

구 분	시설개요	수전전압	전기용량	비 고
전기/기계	TR 250KVA	3상4선식 22.9KV/380 - 220V	250KW	특고압

* 전기안전관리자 선임대상  – 저    압 : 계약전력 75kw이상

- 고압이상 : 용량에 관계없이 선임대상

Ⅲ		‘15년 용역계약 현황

용 역 명 : 양화한강공원 친수공간조성 전기안전관리대행 용역

계 약 일 : 2015.03.16

용역기간 : 2015.03.20. ~ 2015.12.20(7개월)

용역내용 : 물놀이장 전기안전관리 전반

용역업체 : ㈜동양티피티  대표자 : 유태완

계약금액 : 1018,500원(145,500원/월)

Ⅳ		용역 변경내용

변경사유 : 전기기본요금 및 안전관리 용역대행비 절약을 위하여

‘15년 10월부터 내년 수영장 운영업체 선정전까지 전기휴지

※ ‘15.10.6일자 한전측에서 전기단전 조치

용역기간

- 당초 : 2015.03.20 ~ 2015.12.21(7개월)

- 변경 : 2015.03.20 ~ 2015.9.21 (4개월)

※ 7,8월분은 물놀이장 운영 위탁업체에서 용역비 납부

용역변경금액

구 분		당초금액	변경금액	증감금액
용역비	용역원가	925,909원	529,090원	(감) 396,819원
	부 가 세	92,591원	52,910원	(감) 39,681원
	소 계	1,018,500원	582,000원	(감) 436,500원

※ 기지급액(기성금) 436,500원  잔액(금회 지급액) 145,000원

예산과목

-한강공원관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 수영장

유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

Ⅴ		행정사항

상기 변경된 사항을 총무과에 통보하여 계약변경후 준공처리      하고자 함. 끝.