문서번호	급수운영과-21077
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
최용진		11/02 김수영
협 조

공사 실정 보고에 따른 보고서

(월계배수지 상부슬라브 신축이음부 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

보   고   서

명에 의하여 금보건설(주)로부터 접수된 제2015-10-1호 실정보고와 관련, 『월계배수지 상부슬라브 신축이음부 보수공사』 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 02

보고자 : 지방시설주사   최 용 진

1. 관련근거 : 금보건설(주) 문서 제2015-10-1호(2015.10.27.)

『공사현장여건 변동에 의한 실정보고(케미칼 앙카 건) 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계배수지 상부슬라브 신축이음부 보수공사

나. 공사기간 : 2015. 9. 23 ~ 2015. 12. 31

다. 도 급 액 : 185,046,300원

라. 공사개요 : 상부 슬라브 신축이음부 우수방지턱 보수  L=204m

마. 도 급 자 : 금보건설㈜   ********

3. 보고내용

1) 설계시 케미칼 앙카주입 품 누락

가. 공 사 위 치 : 월계배수지 상부슬라브 운동장

나. 당 초 설 계 : 케미캉 앙카주입 품 누락(D=13mm)

다. 현황 및 문제점

- 당초 설계시 상부슬라브 우수 방지턱 작업 중 철근 매입을 위하여 케미칼 앙카주

입액 품이 필요하나 설계시 누락 된 실정으로 정확한 시공과 품질확보를 위하여

케미칼 앙카주입이 필요한 실정임.

라. 검토 의견

- 케미칼 앙카의 역할은 우수방지턱 설치 시 주철근 기둥(D=13mm)을 앵커 매입시

케미칼 약액 주입을 함으로써 기존 부재와의 일체 거동을 하여 구조물의 내진

보강을 도모할 수가 있고 또한, 신구 콘크리트 접착이 확실히 되어 상부 허용

하중에 대하여 보강 및  성토 후 강한 충격에도 뒤틀림현상이 없어 당초보다

안전한 우수 방지턱으로 누수발생이 되지 않고 신축이음 거동에 문제가 없는

구조물로 지탱할 수 있으므로 약액주입 추가 설치품이 반드시 필요하다고 판단

되는바, 시공시 적용하여 설계변경 반영 요함.

- 개략공사비 : 증) 32,380천원

4. 처리의견

상기와 같이 케미칼 앙카 주입이 타당하므로 검토결과를 시공사(금보건설(주))에 통보하여 시공시 적용토록 하고 추후 설계변경시 반영토록 조치코자 합니다.   끝.