문서번호	방재시설부-14604
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장
고소영	김인숙	11/02 임춘근

- 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계) -

분야별 담당자 회의 결과보고

2015.10.

방재시설부

(공원시설과)

경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

분야별 담당자 회의 결과보고

경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)의 원활한 사업 추진을 위하여 분야별 담당자 회의를 실시하고 결과를 보고드림.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 월계동 경춘철교~공릉동 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 53,860㎡, L=1.10㎞

○ 공사기간 : 2015.10.06. ~ 2016.10.05.

○ 공 사 비 : 6,720백만원(공원5,445, 폐기물121,관급1,154,전기통신별도)

○ 시 공 사 : 조경 – 중흥종합건설(주), ㈜건영

토목,건축 – 유텍종합건설(주)

○ 건설사업관리 : ㈜선진엔지니어링, ㈜수성, ㈜진전기

□ 회의개요

○ 일  시 : 2016. 10. 26 (월)  14:00

○ 안  건 : 공사추진 방향 및 분야별 추진계획 등

○ 참석자

‣ 서울시 : 공원조성과 이용남, 정현배

‣ 본  부 : 방재시설부 공원시설과장, 고소영, 박계현, 전지홍

건축부 박춘복, 설비부 김경남, 박병환

‣ 시공사 : 중흥종합건설(주) 김주현 소장, 유텍종합건설(주) 이창남 소장 외1

‣ 건설사업관리 : 권병석 단장, 천영석과장, 기술지원감리(건축)

□ 회의결과

○ 2단계 통합(조경, 토목, 건축, 전기) 예정공정표 작성

⇒ 각 분야별 유기적 협조로 공정간섭 최소화

○ 객차 설치에 따른 사전 공정 추진

⇒ ‘15. 12월 초 반입 예정, 기존 선로 해체 및 재설치 선행

○ 공용건축물(공릉지하보차도 및 객차)에 대한 건축 착공신고 필요

○ 전기통신분야 조속한 현장투입

⇒ ‘15.11.10. 전기통신분야 계약예정

○ 산업대3길 고가철교 정비 추진

⇒ 통과높이 변경에 따른 설계변경 및 분야별 세부 검토

○ 자전거도로 세부 공정계획 수립

○ 지장물에 대한 개별관리 리스트 작성 및 처리 계획 수립 : 20건

⇒ 주민홍보, 관계기관 협의(협조,통보) 등 지속적 실시로 조속 처리

○ 현장사무실 주변 정리

□ 조치계획

○ 지장물 처리를 위한 주민 홍보 및 관계기관(노원구청) 협의

○ 객차구매 운반 설치 : 15. 12월내

○ 분야별 유기적 공정 계획을 통한 효율적 공정추진. 끝.