문서번호	건축부-12383
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	건축부장
김찬유		신명승	11/02 안재혁
협 조

재사용플라자 건립공사

관급자재 구매 계획보고(실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

건  축   부

(환경시설과)

재사용플라자 건립공사

관급자재(강판탈형데크플레이트) 구매계획보고(실정보고)

우리 본부에서 추진 중인 재사용플라자 건립공사의 건축공사 관급자재(강판탈형 데크플레이트)에 대한 구매 계획보고(실정보고)임

1. 공사개요

○ 공 사 명 : 재사용플라자 건립공사

○ 대지위치 : 성동구 용답동 250-1외 4필지

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 16,529.57㎡

○ 용    도 : 도시계획시설(폐기물처리시설중 재활용시설)

○ 공사기간 : 2015. 1.15. ~ 2017.01.14.(24개월)

○ 도급금액 : 금17,263,207,070원

○ 시 공 자 : 동원건설회사(현장대리인 원장재), ㈜서우건영

○ 건설사업관리자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소 외1(책임건설사업관리기술자 김일영)

2. 추진경위

○ 2012. 8.     : 서울재사용플라자 조성계획 수립(자원순환과)

○ 2013. 4. ~ 2014. 10. : 설계용역〔(주)삼우종합건축사사무소)〕

○ 2015. 1.15. : 건축공사 착공

○ 2015. 1.22. : 건설사업관리용역 착수

○ 2015. 4. 2. : 기공식

○ 2015.10.12. : 관급자재(레미콘) 규격 변경 실정 보고 (CM단)

○ 2015.10.13. : 관급자재(단열재부착형 덱플레이트) 수급계획 변경보고(CM단)

○ 2015.10.28. : 관급자재(일반탈형 데크플레이트) 수급계획변경 보고(실정보고)(CM단)

3. 관급자재 현황 및 구매계획(실정보고)

□ 일반탈형 데크플레이트 구매계획

품 명	공종	단위	규 격	탈형재 재질		수 량		비 고
				당초	변경	당초	변경
일반탈형 DECK PLATE	건축	㎡	데크높이 H:120,160,210	합판(T12) (H:120, 160,210)	강판(T12) (H:120, 160,210)	-	-
			10085.H:120			3,325	3,325
			10085.H:120			4,035	0
			10085.H:160			1,299	0
			10085.H:120			881	0
			10085.H:120			0	4,035
			10085.H:160			0	1,299
			10085.H:210			0	881
			총계			9,540	9,540

□ 일반탈형 데크플레이트 구매 금액 비교 검토                 (단위 : 원)

품명	규 격	단위	수량	① 설계내역서 (2014)		② 합판탈형 (물가정보 2015, 동아에스텍)		③ 강판탈형 (물가정보 2015, 덕신하우징)
				단가	금액	단가	금액	단가	금액
일반탈형 DECK PLATE	10085.H:120	㎡	3,325	25,500	84,787,500	32,500	108,062,500	25,900	86,117.500
	10085.H:120	㎡	4,035	26,500	106,927,500	34,500	139,207,500
	10085.H:160	㎡	1,299	29,000	37,671,000	36,500	47,413,500
	10085.H:210	㎡	881	31,000	27,311,000	36,500	32,156,500
	10085.H:120	㎡	4,035					26,900	108,541,500
	10085.H:160	㎡	1,299					26,900	34,943,100
	10085.H:210	㎡	881					26,900	23,698,900
소 계					256,697,000		326,840,000		253,301.000
탈 형 비							포함		28,265,600 (협의율90.718%적용)
부가가치세					25,669,700		32,684,000		부가세포함
합 계					282,366,700		359,524,000		281,566,600
설계가격대비 (①~③)									① 대비 : 감 800,100원 ② 대비 : 감 77,957,400원

□ 소요예산 : 282,934,420원

○ 강판탈형 데크플레이트(조달구매) : 254,668,820원(부가세포함)

= 253,301,000원+(253,301,000원×0.54%) = 254,668,820원

○ 강판탈형 데크 해체비(설계변경) : 증 28,265,600원

□ 관급자재 변경내용 및 검토의견

○ 설계도면상 합판탈형 데크플레이트는 “붙임1” 건설사업관리단 실정보고와       같이 조달우수제품등록(우선구매대상)되어 있는 강판탈형 데크플레이트(덕신하우징)        제품으로 변경 구매하는 것이 타당함.

○ 강판탈형 조달구매 및 추가되는 강판탈형 데크해제비 증 28,265,600원에          대하여 건설사업관리단의 실정보고와 같이 승인 및 추후 설계변경 반영코자 함.

□ 구매계획

○ 구매방법 : 조달구매

○ 투입시기 : 공사일정에 따라 구매 및 납품요구

□ 예산과목 : 기후환경본부 자원순환과, 효율적인 폐기물처리, 생활폐기물                   재활용 극대화, 서울 재사용플라자 조성, 시설비

붙임  1. 관급자재(일반탈형 데크플레이트)수급계획 변경보고(실정보고) 1부.

2. 강판탈형 데크 해체비 설계내역서 1부. 끝.