문서번호	물순환정책과-3882
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
김경희	윤승범	11/02 최진석

2015년 토양오염실태조사 시료채취용역 설계변경

2015. 10.

2015년 토양오염실태조사

시료채취용역 설계변경

2015년 토양오염실태조사 시료채취 용역 중 시료채취지점 및

측정공수의 감소 등 과업변경으로 설계변경 시행하고자 함

용역 개요

❍ 용 역 명 : 2015년 토양오염실태조사 시료채취 용역

❍ 계 약 자 : (재)그린환경연구원외 1개사

❍ 계약기간 : ’15.7.16 ~ 10.31

❍ 계약금액 : 86,019,100원

❍ 주요과업 : 시료채취, GPS측정, 시료채취공 원상복구

변경 내용

❍ 주요 변경내용

- 시료 굴착공 조정 : 30공 ▽(446공→416공)

- 복구 물량 조정   : 30개 ▽(446개→416개)

- 시료 채취수 조정 : 41개 ▽(486개→445개)

구 분	변경전	변경후	비 고
굴착공	446공	416공	30공 감소
시료채취	486개	445개	41개 감소

❍ 계약금액 변경 : 감 5,711,150원(86,019,100원→80,307,950원)

구 분	당 초	변 경	증·감
계	86,019,100원	80,307,950원	▽5,711,150원
실태조사 시료채취	54,491,091원	50,825,901원	▽3,665,190원
GPS측정조사 및 자료처리	17,804,320원	16,606,720원	▽1,197,600원
시료채취공 원상복구	5,093,994원	4,764,774원	▽329,220원
제경비 등 (부가세 포함)	8,629,695원	8,110,555원	▽519,140원

행정 사항

❍ 설계변경 내용 반영하여 계약변경하고, 준공처리

❍ 시료분석은 ’15.12.31까지 보건환경연구원에서 시행

붙임 : 용역비 산출내역서(전·후) 각1부.  끝.