문서번호	토목부-23012
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이상욱		권혁대	11/02 노우성
협조
	주무관		강철규

공사 설계변경 검토(총괄10회, 9차1회)

(용비교~행당중간 도로개설공사)

2015.10.

도시기반시설본부

(토목부)

공사 설계변경 검토(총괄10회, 9차1회)

(용비교~행당중간 도로개설공사)

『용비교~행당중간 도로개설공사』의 책임감리원으로부터 제출된 설계변경 승인요청에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 감리부(대외[발])-2015-6393(2015.10.20.)설계변경(전체10회,9차1회 변경) 제출

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 성동구 금호동 용비교 북단 ~ 용비교 남단

○ 규    모 : 도로개설 L=718m, B=19.5~26.4m
-왕복4차로 → 6차로 확장(교량L=519m,토공도로 L=199m)

○ 공사기간 : 총괄‘07.03.22.∼‘15.12.31. , 9차‘15.03.01. ∼‘15.12.31.

○ 도 급 액 : 총괄 26,374백만원 , 9차 2,410백만원

○ 감 리 사 : ㈜건화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링  ○ 시 공 사 : 한신공영(주)

Ⅲ		설계변경 내용

□ 설계변경사유 (총괄10회,9차1회)

○ 실정보고 승인(8건)

- 자전거도로 이설 → 토목부-6300(2015.3.30.)

- 기존교량 포장 → 토목부-7973(2015.4.17.)

- 교통정보시스템 케이블이설 및 복구공사 → 설비부-6158(2015.5.25.)

- 차량방호책 변경 → 토목부-12246(2015.6.15.)

- 투석방지용 휀스 변경 → 토목부-12067(2015.6.12.)

- 보도부 포장방법 변경 → 토목부-14578(2015.7.15.)

- 가시설 계측 정산 → 토목부-20139(2015.9.24.)

- 신축이음장치 변경 → 토목부-21358(2015.10.13.)

○ 보도부 포장 변경 등에 따른 물량 감소 등

□ 설계변경 내역(총괄10회)                          (단위:천원)

	실정보고명	공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증·감
1	자전거도로 이설(교각8)		21,659	21,659	토목부-6300(2015.3.30.)
2	기존교량 포장		1,181,950	1,181,950	토목부-7973(2015.4.17.)
3	교통정보시스템 케이블이설 및 복구공사		99,000	99,000	설비부-6158(2015.5.25.)
4	차량방호책 변경	451,759	401,951	49,808	토목부-12246(2015.6.15.)
5	투석방지용 휀스 변경	39,600	57,156	17,556	토목부-12067(2015.6.12.)
6	보도부 포장방법 변경	152,955	455,180	302,225	토목부-14578(2015.7.15.)
7	가시설 계측 정산	79,299	73,898	5,401	토목부-20139(2015.9.24.)
8	신축이음장치 변경	1,143,505	1,190,178	46,673	토목부-21358(2015.10.13.)
	합 계	1,867,118	3,480,972	1,613,854

□ 공사비 증감 현황(총괄10회)                     (단위:백만원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
1.구조물공	11,634	11,643	9
2.포장공	225	1,413	1,188
3.부대공	1,486	1,582	96
제잡비	2,188	2,349	160
제요율적용 제외공종	882	889	8
물가변동액	667	673	6
공급가액	23,977	25,444	1,467
부가가치세	2,397	2,544	146
도급액	26,374	27,988	1,614
관급자재	1,280	1,278	2
총공사비	27,654	29,266	1,612

□ 설계변경 내역(9차1회)                              (단위:원)

	공 종		공 사 비			비 고
			당 초	변 경	증·감
1	구조물공	토공	35,239,289	14,039,350	21,199,939	하천블럭 수량제외
2		상부공	1,585,135,848	1,561,600,577	23,535,271	차량방호책 수량감소
3		가교설치철거	8,721,130	-	8,721,130	진입로 가교철거제외
4		옹벽공	6,902,797	-	6,902,797	잔여분 제외
5		응봉산 연결계단	5,093,909	3,272,842	1,821,067	수량감소
6	포장공		171,860,558	82,344,514	89,516,044	보도부 포장 및 자전거도로 제외
7	부대공		9,548,420	14,243,390	4,694,970
8	직접공사비		1,835,629,682	1,688,628,404	147,001,278
9	제잡비		420,748,318	387,486,596	33,261,722
10	물가변동		153,802,000	131,642,000	22,160,000
11	도급액		2,410,180,000	2,207,757,000	202,423,000

□ 공사비 증감 현황(9차1회)                          (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도급비	2,410,180	2,207,757	202,423
감리비	350,000	350,000	-
전기공사	100,000	270,000	170,000
보상비	20,000	-	20,000
관급자재	98,770	151,193	52,423
폐기물	21,050	21,050	-
총공사비	3,000,000	3,000,000	-

□ 계약금액 변경                                  (단위:천원)

구 분	도 급 액			비 고
	당 초	변 경	증·감
총 괄(10회)	26,374,458	27,988,312	1,613,854
9차(1회)	2,410,180	2,207,757	202,423

□ 공사기간

구 분	공사기간		비고
	당 초	변 경
총 괄(10회)	2007.03.22. ~ 2015.12.31.	2007.03.22. ~ 2015.12.31.	변경없음
9차(1회)	2015.03.01. ~ 2015.12.31.	2015.03.01. ~ 2015.12.31.	변경없음

Ⅳ		조치의견

○『기존교량 포장 외 7건』실정보고 승인사항 등을 반영하여 설계변경을 요구한 책임감리원의 검토내용이 적정한 것으로 판단되어 계약금액을 조정하고자 함.

붙  임 : 가. 감리검토의견서 1부.
나. 설계변경내역서(총괄10회, 9차1회) 각 1부.  끝.