문서번호	도시철도공무부-320
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		경전철1과장	도시철도공무부장
변재홍		박동룡	01/10 한동근
협조

2014년 1월 2주 휴일 감리근무계획 승인 검토보고

(우이3공구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

2014년 1월 2주 휴일 감리근무계획 승인 검토보고

(우이 3공구)

우이～신설 도시철도(경량전철) 민간투자사업(3공구) 건설공사 관련 시공사의 휴일  작업계획(1월 2주)에 대하여 책임감리사가 시공사에 이를 승인 통보하고, 책임감리 휴일 근무계획 승인 신청서를 제출하여 검토 보고함

휴일근무(1월 2주) 승인 요청내용

근  거

- 동일감(우이) 제14-012호(2014.01.09)

휴일근무 : 1월 11일(토)

휴일근무 계획

관련근거

- 입찰안내서 제4장 제1절 제14조 및 제6장 6.2.3

- 책임감리 현장참여자 업무지침서 제5조③항(감리원의 근무수칙)

근무사유

- 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 통해 지연된 본선터널 굴진작업과 정거장의 토공 및 가시설 공정을 만회하여 시민불편해소에 만전을 기하기 위함

감리원 휴일근무 내용

근무일자	근무형태	시공사 작업 주요내용	비 고
1월 11일(토)	감리원 2명	∙ 정거장구간 토공굴착 및 가시설 설치, 구조물 시공, 상차 ∙ 본선터널 발파굴착 및 천공 주입 등

검토결과

책임감리원의 검토내용과 같이 원활한 공정추진을 위한 연속적인 작업시행을 위하여 아래와 같이 휴일작업 승인조건을 부여하고 감리원의 휴일근무 계획을 승인코자 합니다.

< 책임감리 휴일작업 승인조건 >

- 휴일작업에 감리원은 2인 근무하며 감리비는 시공사 부담

(입찰안내서 제6장 6.2 규정에 의거 원인자 부담)

- 공종별 안전관리 담당자를 지정하여 안전관리에 만전을 기할 것

- 휴일작업 시행전 세부 작업계획을 수립하고 공사관리의 공백이 없도록 공사관리자는 작업장에 상주 정위치에서 근무하도록 감독할 것

- 주요작업 및 유관기관 입회 작업은 평일에 시행토록 감독할 것

< 업무지시 >

- 감리원은 시공사가 제출한 작업계획서의 승인조건 이행여부 지도감독 및 품질, 안전관리 철저

- 감리자 및 현장 공사관리자는 휴일 작업사항, 시공계획서, 시공상세도를 숙지하고 현장 작업상황이 일치되도록 관리할 것

- 휴일 작업계획의 변경시에는 사전 절차에 따라 보고 후 작업시행 토록 할 것

- 사고발생시 신속하게 매뉴얼에 의하여 사고를 수습하며 즉시 현황사진과 함께 상황보고토록 할 것

붙임  휴일작업에 따른 감리근무계획 승인요청 관련공문 1부.  끝.