문서번호	시설과-8075
결재일자	2015.11.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
라승보		김도섭	11/02 강신재
협 조
	주무관			송병욱

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』

사업수행성과 평가계획 보고

2015. 11.

상수도사업본부

(시설과)

『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사』

사업수행성과 평가계획 보고

건설사업 추진기간, 비용 등의 효율성과 적절성 평가를 위한『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사』사업수행성과 평가계획을 보고 드림.

건설공사 사후평가 평가 구분

가. 사업수행성과: 건설사업 추진기간, 비용 등의 효율성, 적절성 평가(준공후 60일 이내)

나. 사업효율: 건설공사 시행 전후의 수요와 기대효과의 비교(준공후 5년 이내)

다. 파급효과: 해당 지역의 경제와 주민 생활에 미친 영향 등 평가(준공후 5년 이내)

관련근거

❍『건설기술진흥법 제52조, 시행령 제86조』건설공사의 사후평가

❍ 건설공사 사후평가 시행지침(국토교통부고시 제2014-284호)

평가개요

❍ 평가대상 공사 개요

- 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

- 공사개요 : 표준정수처리 시설 25만톤/일, 고도정수처리 시설 45만톤/일

- 공사기간 : 2009.11.23.~2013. 1.15. → 2015. 4.20.(증 27개월)

- 공 사 비 : 161,098백만원 → 179,098백만원(증 18,000백만원)

❍ 평가내용

- 예상 공사비‧공사기간과 실제 소요된 공사비‧공사기간의 비교, 분석

- 당해 건설공사의 문제점과 개선방안

- 일괄‧대안입찰 방식으로 수행한 경우 건설공사의 추진성과

- 공사비, 공사기간, 효과 등 당해 건설공사에 대한 전반적인 평가

❍ 평가방법

- 사업수행성과 평가표, 일괄‧대안입찰 집행 추진성과 평가표 작성

- 사후평가위원회에서 평가표 작성 적정여부 심의

사후평가 위원회 구성

❍ 심의일시 : 2015. 11. 9.(월) 14:00 ~

❍ 장    소 : 상수도사업본부 4층 회의실

❍ 심의위원: 국토교통부 건설공사 사후평가 위원중 2인 선정

사후평가위원회의 위원은 중앙심의위원회, 지방심의위원회, 특별심의위원회, 다른 발주청의 사후평가위원회 또는 관계 시민단체가 추천하는 사람 및 해당 분야의 전문가 중에서 발주청이 임명 또는 위촉한다.

- 수자원 분야 : ***************

- 토 목 분 야 :************

❍ 심의내용

- 객관적이고 투명한 평가지표 및 측정방법에 관한 사항

- 일괄‧대안입찰 집행 추진성과 평가 적정 여부

행정사항

❍ 건설사업정보포털시스템(https://www.calspia.go.kr/) 결과 입력

❍ 사업수행성과평가표 홈페이지 또는 관보에 공시

❍ 일괄‧대안입찰 집행 추진성과 평가표 및 심의결과 제출(→市 기술심사담당관)

❍ 심의위원 수당 지급

연번	소속	직책	위원명	수당(원)	비고
계				*******
1	********	**	***	*******
2	***	***	***	*******

붙임 : 1. 사업수행성과 평가표 사본(시공사 제출분). 1부.

2. 건설공사 사후평가 시행지침 1부.

3. 서울특별시 건설공사 사후평가 수행 지침 1부. 끝.