서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	한강교량일상유지보수공사 책임감리원 이영세
(경유)
제목	작업지시(배수구 정비) 작업기한 연장 승인 알림(2015년 한강일상유지보수공사)

1. 대콘감(2공구)15-109호(2015.10.30.), 대콘감(1공구)15-76호(2015.10.30)호와 관련입니다.

2. 우리시와 계약 체결하여 시행중인 “2015년 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)” 공사와 관련하여 배수구 정비 작업기간 연장 요청 검토 보고서 제출에 대하여 아래와 같이 변경승인 통보하오니

3. 공사시행 전 공사안내간판 및 안전시설물 설치 등의 안전관리에 철저를 기하여 주시고 시설물의 품질확보와 안전사고 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 작업지시 변경승인

구 분		작업기한		비 고
		변경전	변경후
작업지시 (배수구 정비)	공사기간	2015. 10. 30	2015. 11. 30	배수구 정비 취약구간(낙엽 및 토사 등으로 배수구가 자주 막히는 구간) 추가 정비에 따른 작업기간 연기
	작업시간	주간	주간

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백운경		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	11/02 이용심
협조자
시행	교량안전과-3997	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	300-8452	/전송	300-8459	/		/	대시민공개