투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	우이신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구) 변경 계약의뢰

1. 도시철도사업부- 9241호(2015.10.20)와 관련입니다.

2. 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)과 관련하여 물가변동(제13회)으로 인하여 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역(2공구)

나. 계 약 자 : ㈜유신외 3개사

다. 용역기간

구 분	당 초	변 경	비 고
총 괄	2009.01.07 ~ 2017.1.31	변경없음
7 차	2015.05.21. ~ 2016.02.07	2015.05.21~2016.03.17	증) 40일

라. 용역금액                              (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	사 유
총괄 (16회)	3,827,090,000	3,873,620,000	증)46,530,000	- 계약금액 : 증) 46,530,000 ․ 물가변동 : 증) 46,530,000
7차 (1회)	591,080,000	591,080,000	변경없음	- 계약금액 : 변경없음 ․ 물가변동 및 투입계획 조정

마. 예산과목 :

- 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리대책추진,

감리비(166,080천원)

- 신교통수단도입, 경전철건설사업,우이-신설 지하경전철건설, 시설비

및 부대비, 감리비(425,000천원)

첨 부  1) 계약금액 조정 검토보고서 1부

2) 감리변경설계서(총괄16회 및 7차1회) 1부.

3) 총괄16회 변경설계서 1부.

4) 제7차1회 변경설계서 1부.

5) 합의각서 1부 . 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	안창호		경전철2과장	최광무		도시철도사업부장	11/03 권영찬
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	도시철도사업부-9697	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩 9층	/	WWW.seoul.go.kr
전화	02-772-7188	/전송	02-772-7135	/	changho@seoul.go.kr	/	부분공개