문서번호	물재생과-7201
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장	중랑물재생센터소장
차성민		강병수	11/03 김동기
협조
	주무관		최승룡

『2015년 건설폐기물 처리용역』

처리계획 수정 보고

2015. 11.

중랑물재생센터

(물재생과)

『2015년 건설폐기물 처리용역』

처리계획 수정 보고

센터내 토목시설물 유지보수공사(연간단가)에서 U형 플륨관 교체로 건설폐기물 물량 증가에 따른 수정 보고임.

▣ 공사개요

○ 사 업 명 : 2015년 건설폐기물 처리용역

○ 도 급 자 : 삼원환경(주)

○ 도 급 비 : 30,112,000원

○ 공사기간 : 2015.04.30. ~ 2015.12.31.

▣ 보고내용

○ 토목시설물 유지보수공사에서 아래와 같이 건설폐기물 물량이 증가됨

○ 폐기물 산출 내역

종 류 물 량	폐아스콘 (추정량)	폐콘크리트 (추정량)		혼합폐기물 (추정량)	비 고
		변경전	변경후
계	-	300톤	600톤	82톤
공사업체 (차집,토목 등)	-	300톤	600톤	-
센터내 (건축,대청소 등)	-			82톤

▣ 조치의견

○ 위 폐기물을 2015년 건설폐기물 처리용역』업체에 작업지시하여 처리하고       추후 설계변경에 반영하여 정산코자 함.(개략 6,000천원 증)

붙임 : 현황사진 1부.    끝.