함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	영등포구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2013년도 종합사회복지관 기능보강사업 계획변경 승인신청건 검토 결과 알림

1. 영등포구 복지정책과-84호(2014.1.2.) 및 서울시 복지정책과-641호(2014.1.8.)내용과 관련입니다.

2. 2013년도 기능보강사업 추진과 관련하여 사업계획 변경 요청한 아래 사안에 대해 다음과 같이 검토결과를 통보하오니 집행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

O 변경요청 및 검토결과                                       (단위:천원)

시설명	사업명	변경요청				변경(후)				변경사유	검토의견
		계	시비	구비	자부담	계	시비	구비	자부담
영등포 복지관	장애인화장실 설치 및 로비공간 확보 공사	40,320	20,160	20,160	-	46,965	20,160	20,160	6,645	장애인이용 편의증진을 위해 당초설계 변경 및 지역주민 복지증진을 위한 북카페 조성	“승인” 추가사업비 6,645천원 자부담
		- 장애인화장실출입문 : 나무문 → 자동문 변경 - 남자소변기 2개 → 1개 - 일반출입문 4개 ← 자동문 2개 - 로비공간에 북카페 조성 : 추가사업

붙  임 : 2013년 기능보강사업 계획 변경 승인 요청 검토결과(영등포구-영등포) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이미진		복지시설팀장	오은미		복지정책과장	01/10 엄의식
협조자
시행	복지정책과-835	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-7355	/전송	2133-0718	/	abigail74@seoul.go.kr	/	대시민공개