문서번호	방재시설부-14697
결재일자	2015.11.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	11/03 임춘근
협조
	주무관		임성은

「경의선숲길 공원조성공사」 - 2단계 2차 사토운반 정산 실정보고 검토

2015. 11

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』 - 2단계 2차

사토운반 정산 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 - 2단계2차 와 관련하여 제 1 사토장(인천광역시 연수구) 사토운반 정산 실정보고에 대한 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015 – 205(2015.03.27.) 『사토장 선정 실정보고 승인요청』

방재시설부-4289(2015.04.02.) 『사토장 선정 실정보고 승인 통보』

경의경춘(감) 제2015 – 856(2015.11.02.) 『사토장 정산 실정보고 승인요청』

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 A=84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 12,244백만원

Ⅱ

실정보고 내용

○ 사토운반 승인 현황

- 사토장위치 : 인천광역시 연수구 송도동 297,300㎡(아암물류2단지 내)

- 사토장 선정 운반거리 : 39.57km

○ 사토운반 정산 내용

구 분	당 초	변 경	비 고
운반장비	15톤 덤프트럭	24톤 덤프트럭	-운반거리 변경없음 - 사토잔량은 제2사토장반출예정
운반시간	189.4분	170.0분
사 토 량	21,299㎥	8,203㎥(기시공 정산)

○ 공사비 정산 검토

(단위 : 백만원)

구 분	당 초 (단가 25,038원/㎥)	변 경 (단가 18,909원/㎥)	증 · 감	비 고
순공사비	205	155	감) 50	협의율 적용 (90%)
제 경 비	78	59	감) 19
도 급 액	283	214	감) 69

Ⅲ

감리단 검토의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 사토운반 정산에 대하여 검토한 결과 운반장비, 운반시간 변경(운반경로 여건 및 교통량 등 반영)에 따른 단가 조정은 적절한 것으로 판단되며,

○ 사토단가 조정으로 인하여 기 시공 완료수량(8,203㎥) 공사비는 약 69백만원 감액되는 것으로 검토됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 실정보고 승인한 사토장과 관련하여 사토운반 정산에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인 통보하여 차후 설계 변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙  임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.