문서번호	기전설비2과-146
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비2과장	시설부장
박중모		김두석	01/13 차광재
협 조
	기획예산과장			박기영
	주무관			장보금
	주무관			최연호

-망원초록길 조성공사-

물가변동 조정신청액(3회) 적정성 심사계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 01

시  설  부

(기전설비2과)

-망원초록길 조성공사-

물가변동 조정신청액(3회) 적정성 심사계획

『망원초록길 조성공사』의 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청액(3회)에   대한 원가검토전문기관 의뢰 적정성 심사계획 보고임.

Ⅰ		공사개요

○ 공사기간 : (전체)'10.1.6 ~ '14.6.30, (4차)’13.1.25 ~ ’14.2.28

○ 도 급 비 : (전체)25,320백만원, (4차)8,349백만원

○ 시 공 사 : 통일건설(주)외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜수성엔지니어링외 1개사

○ 공사규모

- 초록길 조성 : 폭 50m,  상부공원 조성 : 5,400㎡

- 강변북로 지하화 : 총 연장 305m (지하차도 50m, 옹벽 255m)

Ⅱ		물가변동으로 인한 계약금액 신청내용

○ 신청내역(망원감 제13-19호 :‘13.02.13)

구 분	금 액(원)	비 고
① 도급계약금액	24,113,500,000	․ 1회 e/s : 409,133,000원 ․ 2회 e/s : 464,239,000원
② 물가변동 제외금액	14,855,248,000	․ 전체예정공정율 : 60.67% ․ 기 성 수 금 율 : 56.82% ․ 물가변동적용제외율(max) : 61.69%
③ 물가변동 적용금액	9,258,252,000	① - ②
④ 물가변동 조정율	3.05%
⑤ 물가변동 등락금액	282,376,000	③ x ④
⑥ 선금급 공제금액	0
⑦ 물가변동 조정 신청금액	282,376,000	⑤ - ⑥

Ⅲ		검토내용

○ 관련규정 적합여부

구 분	관련 규정	검토 내용	적합여부
물가변동 기본요건	지방계약법 시행령제73조	․기간요건 : 직전조정일이후 90일이상 경과여부 - 직전조정일 : ‘10.09.30 - 조정기준일 : ‘12.09.30	적합 (730일경과)
		․등락요건 : 직전조정일기준 3%이상 등락 여부 - 지수변동율 : 3.05%	적합 (3%이상)

○ 물가변동 기본요건은 충족되나, 산출된 지주조정율이 3.05%로 등락요건 3.0%와 거의 동일

○ 좀 더 객관성과 신뢰도 등을 확인하기 위해서 원가검토전문기관인 지방계약원가협회에 등록된 업체중 1개사를 아래와 같이 선정하여 적정성 심사를실시코자 함.

- 검토의뢰기관 : (사)현대경제정보연구원

- 검토의뢰 수수료 : 2,500천원

- 관련규정 :

- 지장자치단체 입찰 및 계약 집행기준(안전행정부예규 제21호:2013.6.19) -

제6절 제5항(계약금액의 조정) : 계약담당자가 청구금액의 적정성에 대하여 직접 심사할 수 없는 경우에는 지방계약법시행령 제6조 제2항(원가검토전문기관)에 따라 제2장 제7절 제2관에 따른 원가검토기관에 위탁할 수 있다.

Ⅳ		조치의견

○ 상기 원가검토전문기관의 적정성 심사결과에 따라 시공사로부터 청구된 계약금액 조정 신청을 반영코자 함.

첨부 : 1. 원가 적성성 심사의뢰 수수료 견적서 2부.

2. 물가변동으로 인한 계약금액 조정 실정보고서(3회) 1부(별첨). 끝.