투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(건축 및 토목시설물 정밀점검 용역)

1. 우리센터에서 시행하고 있는“건축 및 토목시설물 정밀점검 용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 건축 및 토목시설물 정밀점검용역

나. 용역기간 : 2015. 5. 11 ~ 2015. 11. 6

다. 도 급 자 : ㈜제이스코리아  대표 이상철

라. 변경사유 : 용역수량 증(탈수기동 추가 과업)

마. 예산과목 : 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리,

난지물재생센터 공통분야 유지보수, 시설비및부대비, 시설비

바. 설계변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증․감	비 고
총용역비	44,146,370	58,931,070	증14,784,700
도 급 비	43,876,370	58,931,070	증15,054,700
이 설 비	270,000	-	감270,000

첨부  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경서 1부.

3. 관련보고서 1부.  끝.

주무관	김민호		주무관	강희석		시설팀장	代김민호		물재생과장	김일운
난지물재생센터소장	11/04 가길현
협조자	주무관	황재상		관리과장	이재성
시행	물재생과-4589	(		)	접수		(		)
우	10542	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동)	/
전화	02-300-8558	/전송	02-300-8580	/		/	대시민공개