투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사(표지) 준공기한 연기 승인 통보(남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사)

1. 토목부-23194(2015.11.04.)호 와 관련입니다.

2.  위 호와 관련하여 『교통안전시설 원인자부담공사 준공기한 연기 요청』에 대하여 아래와 같이 처리하였음을 통보하오니 공사품질 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 아      래 -

구 분	시 공 사	원 인 자	당 초	변 경	비 고
표지	㈜다해산업개발	도시기반시설본부(토목부)	2015.10.31.	2015.12.10.	승인

3. 연기사유 : 한전․통신 지중화사업 추진 지연 및 교통체계 개선을 위한 시설변경에 따른 공사기간 연기. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김근수		기전과장	11/04 박재경
협조자
시행	기전과-13946	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	billymi@seoul.go.kr	/	대시민공개