투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	남문주차장 등 녹지대 정비공사 설계변경 시행

1. 시설개선과-    (2015.11.04)호와 관련입니다.

2. 『남문주차장 등 녹지대 정비공사』 시행 중 현장여건에 따른 물량변경 및 보험료 정산사항이 있어 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 남문주차장 등 녹지대 정비공사

나. 공사기간 : 2015. 09. 16 ~ 2015. 11. 04

다. 도 급 자 : ㈜세성산업   대표 이재구

라. 변경사유 : 현장 여건에 따른 물량변경 및 보험료 정산

마. 변경내용(공사금액)                                           (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도 급 비	***********	***********	**********

바. 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 노후체육시설개보수사업, 잠실운동장시설유지보수, 시설비및부대비, 시설비

붙  임 : 1. 설계(변경) 내역서 1부.

2. 설계변경 검토 보고서 1부.

3. 제비율 검증 1부.  끝.

주무관	안현미		시설개선과장	11/04 신동호
협조자	주무관	권수식
시행	시설개선과-9609	(		)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25 잠실종합운동장	/
전화	2240-8791	/전송	2240-8777	/	ahmland@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)