투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시) 준공기한 연기 요청

1. 강서도로사업소 도로보수과-6388(2015. 7. 8.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중에 있는 “남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사”와 관련하여 교통안전시설물 원인자부담공사(노면표시)에 대하여 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

구 분	당 초	변 경	변경사유
공 사 명	남부순환로 개봉역앞 토목공사중 교통시설물공사(노면표시)		- 한전ㆍ통신 지중화사업 추진 지연 및 교통체계 개선을 위한 시설변경에 따른 공사기간 연기
공사장소	남부순환로 (개봉역앞)
원 인 자	서울특별시 도시기반시설본부
공사기간	승인일로부터 ~ 2015.10.31	승인일로부터 ~ 2015.12.10
설 계 자	주)트래픽스	주)트래픽스
감 리 사	주)트래픽스	주)트래픽스
시 공 사	(주)다해산업개발	(주)다해산업개발
설치내역	백색 : 240 황색 : 150 청색 : 80	백색 : 240 황색 : 150 청색 : 80

붙임 : 교통안전시설물 원인자부담공사 관련서류 각 1부.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	손영란		광역도로과장	진재섭		토목부장	11/04 노우성
협조자
시행	토목부-23195	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	syoungran23@seoul.go.kr	/	대시민공개