문서번호	교량안전과-4132
결재일자	2015.11.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
김시련		류봉현	11/04 이용심
협조

영동대교 보수공사

실정보고 검토결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

안전총괄본부

(교량안전과)

영동대교 보수공사

실정보고 검토결과 보고

영동대교 외 1개교량 보수공사 시행 중 1종교량 보수·보강공사 건설사업관리단 실정보고 승인요청에 따른 검토결과 보고임

Ⅰ		공사개요

구 분	영 동 대 교	천 호 대 교
위 치	광진구 자양동 ~ 강남구 청담동	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동
2. 사업기간	‘15. 6. 3. ~ ’15. 11. 30
3. 도 급 비	786백만원	541백만원
4. 규 모	교면포장 22a - 교면방수 22a 단면복구 986.5㎡ 표면보수 216.0㎡ 공간비계 설치 4,400㎡	교면포장 8a - 교면방수 8a 신축이음 교체 51.5m 단면복구 624.5㎡ 교량받침교체 2개소, 부반력제어장치 1개소
5. 시공회사	㈜엘씨엠이엔지 대표 박미애
6. 감 리 사	(주)한국건설관리공사

Ⅱ		실정보고 주요 내용

현 황

- 2013년 영동대교 정밀안전진단 결과 외관조사망도에서 나타난 손상 및 결함 사항을 토대로 사업우선 순위별 보수물량에 따라 공사 발주하여 사업시행 과정에서,

- 정밀안전진단 보고서(외관조사망도)의 손상 및 결함사항에 대하여 단면복구 Ⅰ(10mm)로 984.6㎡를 보수토록 제시되어 있으나,

- 기존의 바닥콘크리트 하면의 상태가 양호하며, 강성이 크므로 치핑도 쉽지않아 오히려 신·구콘크리트 계면박리 등 상태가 양호한 기존의 콘크리트 바닥판 하면을 손상시키는 결과를 초래할 수 있음

- 따라서 단면복구 Ⅰ(10mm)로 계약된 수량 중 상태가 양호한 바닥콘크리트 하면에 대하여는 금회 공사구간에서 제외토록하고,

- 단면복구 Ⅰ(10mm)로 보수토록 제시된 수량 중 표면의 도막처리로 시설물의 공용수명을 연장할 수 있는 등 0.3mm 미만의 균열에 대하여는 표면보수로 일부 반영이 불가피한 실정임.

- 전차(2014년 정밀안전진단) 용역 참여기술자의 합동점검 결과 구조물    내구성 및  안전에 이상이 없는 부분은 금번공사에서 제외 의견등 개진

합동점검사진1(바닥판하면 확인) -P9~P8,3열(L=18m)	합동점검사진2(바닥판하면 확인) -P9~P8,3열(L=18m)

문제점

- 기존 콘크리트(바닥판 하면)의 상태가 양호하여 강성이 크므로 치핑 후 단면복구 공사를 시행할 경우 신 · 구 콘크리트 계면박리 등 하자의 우려가 있으며, 치핑의 깊이에도 한계가 있음.

- 영동대교의 특성상 플레이트 거더하부에서 콘크리트 바닥판의 손상 및 결함을 조사하기에는 이격 거리가 2.4m로 고소작업차의 근접 조사에는 한계가 있어 망상균열과 흡사한 거미줄의 산재로 인한 오인 등의 원인으로 판단됨

관련 근거 : 감리단 실정보고 1종교량-2226호(2015.11.02.)

- 영동대교의 플레이트 거더하부에서 콘크리트 바닥판의 손상 및 결함을    조사하기에는 이격 거리가 2.4m로 고소작업차의 근접 조사에는 한계가    있어 망상균열과 흡사한 거미줄의 산재로 인한 오인 등의 원인으로     조사가 명확하게 이루어지지 않은 점을 감안,

- 따라서 단면복구 Ⅰ(10mm)로 계약된 수량 중 상태가 양호한 바닥콘크리트 하면에 대하여는 금회 공사구간에서 제외토록하고,

- 단면복구 Ⅰ(10mm)로 보수토록 제시된 수량 중 표면의 도막처리로 시설물의 공용수명을 연장할 수 있는 등 0.3mm 미만의 균열에 대하여는 표면보수로 일부 변경이 불가피한 실정임.

주요공종 증.감 내역                                    (단위:천원)

№	공 종	규 격	단 위	수 량			공 사 비			비고
				당초	변경	증,감	당초	변경	증,감
○ 콘크리트보수
1	표면보수	천정	㎡	260.9	500.0	239.1	11,311	21,680	증)10,368
2	단면복구Ⅰ	천정,10mm	㎡	984.6	200.0	-784.6	91,066	18,498	감)72,568

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

검토내용

- 1종 교량 보수공사 건설사업관리단으로 부터 제출된 실정보고 내용을 검토한바, 기존의 바닥콘크리트 하면의 상태가 양호하며, 강성이 크므로 치핑도 쉽지않아 오히려 신·구콘크리트 계면박리 등 상태가 양호한 기존의 콘크리트 바닥판 하면을 손상시키는 결과를 초래할 수 있으므로,

- 단면복구 Ⅰ(10mm)로 계약된 수량 중 상태가 양호한 바닥콘크리트 하면에 대하여는 금회 공사구간에서 제외 토록하고,

- 단면복구 Ⅰ(10mm)로 보수토록 제시된 수량 중 표면의 도막처리로 시설물의 공용수명을 연장할 수 있는 등 0.3mm 미만의 균열에 대하여는 표면보수로의 전환하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

조치계획

- 상기 검토 의견과 같이 실정보고된 내용을 승인 조치하여 공사추진에 만전을 기하고, 추후 설계변경시 실 정산 반영토록 통보하고자 함.

붙 임 : 실정보고 관련문서 1부.  끝.