투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	회의소집 요청

서울과학관 건립공사 조경공사 관련하여 현안사항을 논의 하고자 회의소집을 요청

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 소집일시 : 2015.11.6(금) 15:00

- 회의장소 : 현장 상황실

- 참석대상 : 건축부 – 환경시설과장·건축담당(총괄)·토목담당

방재시설부 - 조경시설과장,조경담당

감리단장,현장소장,조경감리,토목감리,조경현장소장

- 회의안건 : 육생비오톱 식재구간 법면처리(절토)건, 옥상조경(데크시공)공사건

- 현    황 : 현재 선행공정(건축 등) 지연으로 인하여 조경공사가 착수되지 못하고

있고 관급자재(목재판재)납품도 연기(2015.11.20까지)한 상태임

특히 육생비오톱 식재구간 법면처리(절토)는 토공(토목)에서 처리할 사항

으로 판단되나 현재 결정이 안된 상태여서 식재공사 지연되고 있음

- 조치사항 : 조경공사 절대공기 부족할 것으로 판단됨으로 조속한 선행공정 진행 및

법면처리(절토)주체를 확정하여 식재공사 조속시행

※ 회의시 감리단에서는 회의내용,결정사항 등을 자세히 기록 해당부서에 실정보고                    조치.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건축부장,서울과학관 건립공사 책임감리원,주(부석원)
주무관	임봉규		조경시설과장	신용우		방재시설부장	11/04 임춘근
협조자	환경시설과장	신명승
시행	방재시설부-14757	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 방재시설부	/
전화	02-3708-8795	/전송	02-3708-8756	/	lbg98909@seoul.go.kr	/	대시민공개