투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약의뢰(2015년 도로시설물 세척용역-서부)

1. 시설보수과-9523(2015.11.3.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『2015년 도로시설물 세척용역-서부』에 대한 설계변경을 아래와 같이 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2015년 도로시설물 세척용역-서부

나. 용역기간 : 2015. 3. 30 ~ 2015. 12. 31.

다. 도 급 자 : ㈜다인티엠에스 대표 김성곤

라. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
도급비	총용역비	681,794,000	774,357,000	증)92,563,000
	공급가액	619,812,728	703,960,910	증)84,148,182
	부가가치세	61,981,272	70,396,090	증) 8,414,818
	계	681,794,000	774,357,000	증)92,563,000

마. 예산과목

- 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척)일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비(▲78,670,000)

- 일반교량관리, 도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비(▲13,893,000)

바. 설계변경 사유

- 2015년 도로시설물 세척 작업 시행에 따른 세척물량 증·감

붙임 : 1. 설계변경 시행문 1부.

2. 낙찰차액 사용 및 설계변경 검토 보고 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

								서울특별시 서부도로사업소장
주무관							이동섭				주무관					김지환					시설보수과장					11/04 代김지환
협조자
시행			시설보수과-9590										(						)		접수												(						)
우	03918					마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과																/
전화		02-300-8374							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)