투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	식물원 및 동양관 보일러설치 및 부대공사 설계변경(1차, 공기연장) 계약 요청

1. 시설과-6778(2015.11.04)호와 관련입니다.

2. 우리 대공원에서 시행중인 “식물원 및 동양관 보일러설치 및 부대공사”와 관련하여 설계변경(1차-공기연장) 계약을 요청합니다.

가. 공 사 명 : 식물원 및 동양관 보일러설치 및 부대공사

나. 도 급 자 : 월드베스트엔지니어링㈜ 대표 황선엽

다. 공사기간 변경

- 당초 : 2015.09.09. ~ 2015.11.07.

- 변경 : 2015.09.09. ~ 2015.11.22.(공기연장 15일)

라. 설계변경내역 (금액 변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	263,489,350	263,489,350	-	변경 없음
도 급 비	263,489,350	263,489,350	-

마. 설계변경 사유 : 기계실 내 보일러 반입 여건이 어려운 상태로 보일러 반입을                                  위하여 추가 공정이 불가피하여 공기 연장이 필요함.

붙임. 방침서 1부  끝.

	시설과장
주무관	이재균		주무관	조대복		시설과장	11/05 代조대복
협조자
시행	시설과-6811	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-507-7230	/	ioupower@seoul.go.kr	/	부분공개