문서번호	인재기획과-14238
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
남성준		代남성준	11/05 박기용
협조

다솜관 구조 보수·보강 공사관련 설계변경사항 보고

2015. 11.

인  재  기  획  과

(시설재무팀)

다솜관 구조 보수·보강 공사관련 설계변경사항 보고

다솜관 구조 보수·보강 공사관련 철거 및 마감복구 등에 대한 시공성· 경제성 및 현장실정을 반영한 설계변경 사항을 보고 드림

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 다솜관 구조 보수·보강 공사

❍ 공사기간 : 2015. 10. 17 ~ 2015. 11. 06

❍ 공사내용

- 기둥(3개소: 강판보강법) : 지상1층(1개소), 지상2층(1개소), 3층(1개소)

- 바닥보(2개소 : 탄소섬유쉬트 보강공법) : 지상1층(식당)

❍ 공 사 비 : 40,699천원

❍ 시 공 사 : 주) 테스컴엔지니어링 대표 박 영 록

□ 주요 변경내용

❍ 철거 및 마감복구 공사 현장여건을 반영한 수량변경(조정)

- 천정석고보드 철거 수량변경(조정) : 41.3㎡ → 34㎡

- 돌붙이기 수량변경(조정)          : 16.9㎡ → 10.9㎡

- 천정 석고보드 및 천정틀 설치           :  41.3㎡ → 34㎡

- 계단난간 철거 및 설치                  : 4㎡ → 2㎡

□ 세부내용

❍ 공종별 변경내역

공 종 별	변경 전	변경 후	비 고
철거공사	보양 : 179㎡	보양 : 110㎡	수량감소 67㎡
	천정석고보드:41.3㎡	천정석고보드:34㎡	수량감소 7.3㎡
	계단난간 해체 : 4㎡	계단난간 해체:2㎡	수량감소 2㎡
마감공사	돌붙이기 : 16.9㎡	돌붙이기 : 10.9㎡	수량감소 6㎡
	천정틀설치 : 41.3㎡	천정틀설치 : 34㎡	수량감소7.3㎡
	석고보드 설치: 41.3㎡	석고보드설치:34㎡	수량감소7.3㎡
	계단난간설치: 4㎡	계단난간설치: 2㎡	수량감소 2㎡

❍ 분야별 변경금액(제경비 및 부가세 미포함)

분 야 별	변경 전	변경 후	비 고
철 거 공 사	1,468,985	1,029,049	감) 439,936
마 감 공 사	8,991,283	8,074,758	감) 916,525
계	10,460,268	9,103,807	감)1,356,461

□ 처리의견

❍ 상기 변경내용에 대하여 시설비 범위내에서 설계변경(감 2,146,100원) 처리하여 기존 공사사항을 보완코자 함

※ 설계변경 감액금액 : 2,146,100원

- 순수공사비 ; 1,356,461원, 제경비 : 594,539원, 부가세 195,100원

□ 향후 조치사항

❍ ‘15. 11. 05	: 설계변경 처리

❍ ‘15. 11. 06	: 공사준공 처리

붙임 : 1) 설계변경 내역서 1부.

2) 설계변경 합의서 및 설계변경 요청(시공사공문) 1부.  끝.