문서번호	서울숲공원관리사무소-6336
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
김윤수	현호재	11/05 배정복

서울숲공원 유아숲체험장 조성공사 실정보고

2015. 11

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

서울숲공원 유아숲 체험장 실정보고

서울숲 유아숲체험장 조성공사와 관련하여 시공사로부터 실정보고가 있어 아래와 같이 검토보고합니다.

1. 공사개요

○ 기    간 : 2015.08.17 ~ 11.12

○ 도 급 액 : 금팔천이백일십칠만구천원(82,179,000원)

○ 시 공 자 : (주)태원녹화양행 대표 김규태

○ 공사내용

- 시설물공사 : 그늘막쉼터 외 21

- 운 반 공 사 : 목재운반

- 기 타 공 사 : 잡목제거 및 면고르기

○ 공 정 율 : 97% (2015.11.12 현재)

2. 실정보고사항 및 검토의견

구 분	현황 및 문제점	반영사항	검토의견
시설물공사	○ 발주처 요청에 의해 변경	○ 경계목(방부원주) 설치 물량 변경 - 세족장 21.6m → 21.0m 45.0m2 → 43.0m2 - 모래놀이터 9.9m → 12.0m 10.49m2 → 12.72m2	현장여건에 맞게 변경 “ 승인 ”
	○ 발주처 요청에 의해 변경	○ 기존 통나무의자를 다양하게 사용코자 일부를 통나무 징검다리로 변경 - 통나무의자 : 21EA → 14EA - 통나무 징검다리 (7EA) : 0개소→1개소	기 요청사항 “ 승인 ”

구 분	현황 및 문제점	반영 사항	검토의견
시설물공사	○ 우천시 토사유출 위험	○ 산책로 상부 경사면에 흙막이 구간 추가 설치 필요 - 흙막이 A : 4경간 → 3경간 - 흙막이 B : 0경간 → 1경간	안전관련사항 “ 승인 ”
	○ 현장과 도면이 상이	○ 기존 도면의 음수대 보다 가까운 상수시설로 변경하여 연결 - 123.6m → 82.4m ○ 상수관의 위치변경으로 인한 우수관 위치 변경 - 28.5m → 11.0m - 집수정 1개소 → 빗물받이 1개소 교체	현장여건에 맞게 변경 “ 승인 ”
	○ 발주처 요청에 의해 변경	○ 놀이시설 이용 안전을 위해 우드칩 포설 - 밧줄다리 : 5.3M3 - 통나무징검다리 : 4.2M3	안전관련사항 “ 승인 ”

3. 향후계획

○ 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 현장감독에 만전을 기하겠음.

붙 임 :  시공업체 실정보고서 1부.  끝.