문서번호	방재시설부-14829
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
노태학		이도헌	11/05 임춘근
협조

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

신규비목 단가적용 협의 결과 보고

2015. 11.

『용두3 빗물펌프장 신설공사』

협의율 조정회의 결과 보고

용두3 빗물펌프장 신설공사와 관련하여 신규비목(펌프장 위치변경, 상수관이설) 요율적용에 대하여 이견이 있어 단가적용 요율을 협의하고 그 결과를 보고함

사업개요

❍ 공 사 명 : 용두3, 신이문 빗물펌프장 신․증설공사

❍ 규    모

- 용두3 : 펌프장 신설 Q=170㎥(4대)

- 신이문 : 펌프장 신설 Q=875㎥(4대)

❍ 사업기간 : 2013. 1 ∼ 2015. 12.31

❍ 감리사/시공사 : 시설관리공단/동도건설(주)외 1개사

❍ 도 급 비 : 3,922백만원

보고내용

❍ ‘2013년 시공측량한 결과 유입관로 하부에 위치한 제기동역사 구조물과의 이격거리(도시철도 시설물보호구역 0.5m) 유지로 인한 토피고 부족으로인한 자연유하 불가 등의 문제점으로 인해 신설 펌프장 및 유입관로의 규격 및 노선을 변경하는 사항과

❍ "용두3 빗물펌프장 신설공사" 재설계 결과, 신설 펌프장 및 유입관로가 시공될 위치에 기 매설되어 있는 상수도관(D900mm)이 저촉되어 왕산로와 이면도로로 우회 이설을 하는 사항으로

❍ 신규 공종에 대한 협의율 적용과 관련하여 시공사에 단가산정에 있어 낙찰율 적용을 권고하였으나, 도로에서 시행되는 공사로서 교통량이 많은 현지 여건과 야간에 진행되어야 하는 등 작업환경을 감안하여 설계단가 적용을 지속적으로 요청하여 협의조정회의(2015.11.05.)를 한 사항임

협의결과

❍ 공사계약 일반조건 제20조 2항에 의거 설계변경 당시를 기준으로 하여 산정한 단가와 동단가에 낙찰율을 곱한 금액의 100분의 50으로 강제협의율을 적용키로 합의함

붙임 :  시공사 공문 및 조정회의 공문1부.  끝.