투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	설계변경 지시(2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합))

기전과-13963(2015.11.5.)호와 관련하여  ｢2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)｣의 부족한 공사비를 확보하고자 아래와 같이 총공사비를 증액(도급비) 변경하고 통보하오니 빠른 시일내에 설계변경 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)

2. 도급업체 : ㈜벽슬이앤지 대표자 오춘희

3. 설계변경 내용

(단위:원)

구 분	사업비	변경(전) 금액	변경(후) 금액	비 고
유지보수공사 (통합)	도급비	175,553,000	200,000,000	증 24,447,000
	관급비	40,000,000	40,000,000	-
	이전비	10,000,000	10,000,000	-
	총공사비	225,553,000	250,000,000	증 24,447,000

4. 설계서 제출

- 설계변경 설계서

※ 설계변경시 실정보고사항 등이 누락되지 않도록 주의하시기 바랍니다.

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)벽슬이앤지 대표자 오춘희,(주)영호이앤씨 대표자 서태교
주무관	박태진		기전과장	11/05 박재경
협조자
시행	기전과-13986	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개