문서번호	교통운영과-21614
결재일자	2015.11.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
권혁주		고광섭	11/05 강진동
협조	주무관		최용덕
	주무관		김상범

교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사

계약금액 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.11.

교통운영과

(신호운영팀)

교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사

계약금액 변경보고

2015년 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사 계약금액 변경사유가 발생되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 공사개요

○ 사 업 명 : 교통량측정용용 차량검지기 유지보수(연간단가)공사

○ 계 약 자 : 건웅신호산전(주) 대표 박정현

○ 공사기간 : 2015.5.18.∼2015.12.31.

○ 계약금액 : 금87,472,120원

○ 예산과목 : 교통운영과, 도심교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리,

교통량측정용용 차량검지기 신설 및 보수, 시설비(201-401-01)

○ 계약번호 : 20150*******00

□ 변경사유

○ 각종 공사로 훼손된 교통량측정용 차량검지기 기능회복을 위하여 원인자로부터

수납된 공사비 집행을 위한 물량증가

□ 예산확보

○ 교통량측정용 차량검지기 훼손에 따른 원인자로부터 수납된 예산(세입세출외현금)

□ 관련근거

○ 2015년 교통신호운영사업 추진계획 보고[교통운영과-636(2015.1.12.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 원상복구 비용 수납 보고[교통운영과-20983(2015.10.28.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 유지보수 본공사  1차  시행 보고[교통운영과-19212(2015.10.5.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 원인자공사 1차 작업시행 보고[교통운영과-13079(2015.7.7.)]

○ 교통량측정용 차량검지기 원인자공사 2차 작업시행 보고[교통운영과-20916(2015.10.27.)]

□ 변경금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증⦁감(원)
금 액	87,472,120	182,945,120	증 95,473,000

□ 세부내용

구 분	차 수	금 액(원)	비 고
본 공사	작업 1차	87,472,120	시설비
	소 계	87,472,120
원인자공사	작업 1차	38,966,000	세입세출외현금
	작업 2차	56,507,000	세입세출외현금
	소 계	95,473,000
합 계		182,945,120

□ 향후계획

○ 2015년 교통량측정용 차량검지기 계약금액 변경의뢰(재무과)

○ 신속한 기능회복을 위하여 2015년 교통량측정용 차량검지기 유지보수(연간단가)

계약업체로 하여금 공사시행

붙임 :  1. 교통량측정용 차량검지기 변경 설계내역서 1부

2. 합의각서 1부

3. 2015년 교통신호운영사업 추진계획 1부

4. 교통량검지기 공사시행 보고자료 1부.  끝.