투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	포스코엔지니어링 대표이사
(경유)
제목	전면책임감리용역 중지기간 연장 알림(동부1공구)

1. 토목부-24309(2014.12.8.)호와 관련입니다.

2. 귀 사와 2007.12.26. 계약체결한 『동부간선도로확장공사(1공구) 전면책임감리용역』은 현재 용역 중단상태로‘15. 11월부터 재착수할 예정이었으나 과업에 포함된 「경원선 철도이설 공사」가 미완료된 상태로 현재로서는 과업을 추진할 수 없는 실정입니다.

3. 따라서 본 공사가 본격 착수되기 1개월 전인‘16.12.경 전면책임감리용역의  재개가 가능함을 알려드리며, 향후「경원선 철도이설 공사」추진 공정에 따라 감리업무기간이 조정될 수도 있음을 알려드립니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김동현		교량건설과장	이동훈		토목부장	11/05 노우성
협조자	주무관	박웅교
시행	토목부-23325	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 14	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개