문서번호	교통운영과-21620
결재일자	2015.11.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
박종현		김세교	11/05 강진동
협조

준공기한 연기 보고

(2015년 특별도로교통안전진단 및 실시설계용역)

2015. 11

교통운영과

준공기한 연기 보고

(2015년 특별도로교통안전진단 및 실시설계용역)

용역 현황

용 역 명 : 2015년 특별도로교통안전진단 및 교통사망사고 발생지점 개선 실시설계용역

사업내용

- 특별진단 : 영등포시장교차로 등 2개소

- 단기개선 : 청파로 등 무단횡단금지시설 17개소

계약기간 : 2015.08.17. ~ 2015.11.24

계약금액 : 48,516,000원

계약업체 : 도로교통공단 서울특별시지부

준공기한 연기

당  초 : 2015.08.17. ~ 2015.11.24

변  경 : 2015.08.17. ~ 2015.12.30

지체상금 : 미부과

연기 사유

특별진단 과업지점(영등포시장교차로, 수서역교차로)의 도로구조 변경 등 반영 필요

- 영등포시장교차로 주변 보행환경개선사업 실시설계 중으로서 설계내용 과업에 반영

- 수서역교차로 주변 수도권 고속철도(수서~평택) 노반신설공사로 인한 도로구조 등 변경사항 과업에 반영

무단횡단금지시설 과업대상 변경(시조사교차로~회기역교차로 등 3개소)으로 인한  실시설계 기간 추가 소요

조치의견

원활한 과업추진과 금년내 무단횡단금지시설 설치 완료를 위하여 준공기한을 연기하고 설계용역 수행에 만전을 기하고자 함.

첨 부 : 연기요청 공문 및 계약서 각 1부. 끝.