문서번호	건축부-12566
결재일자	2015.11.6.
공개여부	부분공개
방침번호	행정2부시장 방침 제374호

					시 민
★지방시설사무관대우	건축부장	시설국장	도시기반시설본부장		행정2부시장
신현성	안재혁	형태경	고인석		11/06 이제원
협 조
	법률지원담당관			정석윤
	안전감사담당관			代이이동
	기술심사담당관			김홍길
	재무과장			代권순기
	계약심사과장			김성규
	역사도심재생과장			양병현
	설비부장			代이달영
	방재시설부장			임춘근
	의료시설과장			김충범

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 구성』

사 업  관 리   T F 팀   운 영  계 획

2015. 11

도시기반시설본부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『세운상가 활성화를 위한 공공공간 구성』 사 업 관 리 T F 팀 운 영 계 획

“세운상가 활성화”를 위한 조기 발주가 필요한 사항으로 당초 공사발주절차 이행기간 6개월을 3개월로 단축하기 위하여 관련부서 및 설계자 사업관리 TF팀을 구성하여 업무 추진에 만전을 기하고자 함

	사 업 개 요

Ⅰ

○ 사 업 명 : 세운상가 활성화를 위한 공공 공간 구성 (1단계)

○ 위    치 : 종로 ~ 세운초록띠 공원 ~ 세운상가 ~청계・대림상가

○ 사업규모 : 43,575㎡ (약13,204평) 공원 3,748㎡ 데크보강 및 신설

○ 사 업 비 : 386억(공사비296억원,설계 12억원, 거점공간 확보 40억,기타38억)

○ 사업기간 : 2015. 6 ~ 2017. 5

(설계 : ′15. 6 ~ ′16. 1, 시공: ′16. 2~′17. 5)

○ 공사내용 : 경사광장 및 공원성 3,748㎡, 복합문화공간 설치

데크 보수․보강 8.5~9×860m, 공공플랫폼 설치

데크2열 신설  5.5×430m×2, 보행교설치 : B=10m, L=60m

위치도	조감도

	근거 및 추진방향

Ⅱ

○ 근  거

- 세운상가 활성화를 위한 공공공간 구성은 우리시 중요한 시책 사업임

- 2015.10.13. 행정제2부시장 주재 회의 시, 2016. 1월 공사 발주 및 실시

설계 단축 검토

○ 시행상의 어려움

- 공사발주를 위한 각종 협의 및 심의 등을 순차적에서 병행식으로 변경함으로써 업무 충돌 우려 및 검토시간 미비 예상

- 심의 부서의 무관심 등으로 절차 이행 지연 우려

○  추진 방향

- 관련부서 : 심의 및 협조 부서를 직접 TF팀에 참여시켜 원활한 업무추진

- 설 계 자 : 인력 보강 등을 통한 적시에 필요 도면 작성

	사업관리 TF팀 운영 방안

Ⅲ

TF 운영방안

○ 운영기간 : `15. 11 ～ `16. 2 (4개월)

○ TF팀 회의

- 필요시 개최하되 참석자 명단 사전 통보

○ 해당 심사에 대한 처리가 지연시에는 관련부서에서 대안제시 등 특단의

대책을 마련

○ 병행추진 협조 및 심사조건 부여시 설계가 수시 보완이 필요하므로 설계사무소 인원 보강 (건축 현원 8명 → 12명으로 보강 추진 예정)

○ 협조부서와 설계자는 심사일 및 심사도서작성 제출기간에 보완 등을  위한 특별 협조 체제 유지

TF팀구성도 및 구성원

								T/F 총괄 건 축 부 장
			도시기반시설본부											협력부서							설계자
총괄 점검반						설비분야 점검반								업무 지원반							설계 추진반
(반장 : 담당건축과장) 김충범 :3708-2615						(반장 : 건축설비과장) 김영수 : 3708-8625								(반장 : 협력부서팀장) 이창구 : 2133-8499							(반장 : 총괄소장) 김택빈 : 6233-8533
‣ 설계서 등 서류 확인 ‣ 적정성 확인 ‣ 발주 준비						‣ 설비분야 서류 확인 ‣ 조경분야 서류 확인 ‣ 설계서 확인								‣ 심사 등 관련부서 업무 협조 등 지원 ‣ 운영관련 전반 지원							‣ 심사등 서류 작성 ‣ 각종 설계서 보완
팀 원						팀 원							팀 원								팀 원
신현성(건축)						이호완(기계)							역사도심재생과 (도심활성화팀)				팀장:이창구 담당:박학균				장용순(건축)
																					이상구(건축)
																					박병희(토목)
정재흥(건축)													기술심사담당관 (심사총괄팀)				팀장:이 철 담당:김달국 최장길
						김현숙(전기)
																					김도형(토목)
																					이순재(구조)
이석우(토목)						김재무(조경)							안전감사담당관 (일상감사팀)				팀장:조청훈 담당:박일현
																					이봉완(구조)
																					송준영(기계)
박춘복(건축)													계약심사과 (건축심사팀)				팀장:서홍일 담당:이승철
																					강래담(기계)
																					최장동(전기)
이광백(건축)													법률지원담당관 (계약심사단)				단장:김해봉 담당:권지예
																					최진락(전기)
																					고기영(경관)
													재무과 (계약총괄팀)				팀장:이영훈 담당:김효진
																					유승종(조경)
																					김민철(토목교량)

	행정사항

Ⅳ

○  실시설계단계별 검토서 양식에 따라 점검반의 검토서 작성 제출

○  설계자에게 인원보강 등 수시 연락 비상체계 구축토록 요청

○  방침 수립 후 즉시 시행

따로붙임 : 1.  실시설계 단계별 검토서 1부.

2.  사업추진 일정 1부.

3.  설계참여 기술자 비상연락처 1부.  끝.