문서번호	시설보수과-8720
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤동원		11/06 代유태용
협 조

설계변경(정산) 보고

(2015년 서울교 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

설계변경(정산)보고

(2015년 서울교 보수공사)

기 보고한 추가공사로 인한 물량 증・감 및 각종보험료 미사용 등에 따른 최종 정산 처리된 설계변경내역이 감독기관인 시설관리공단으로부터 제출되어 검토보고 후 조치코자 합니다.

※ 2015.11.5. 시설관리공단 공사감독2처-17958호 “설계변경(정산)보고서 제출”

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 2015년 서울교 보수공사-강서

공사기간 : 2015. 06.17 ~ 2015. 12. 13

공사개요

- 포장보수공 : 개질아스콘포장 71.64a, 도막방수(슈프림데크코트M6) 7,164㎡,

- 콘크리트보수공 : 표면보수 245㎡, 단면보수 2.62㎡, 균열보수 103.2m

- 기타보수공 : 신축이음 중분대차수조인트 236m, 신축이음 덮개판교체 0.9㎡, 강재재도장 2.04㎡, 빗금도색 118㎡, 차선도색 266.3㎡

- 부   대   공 : 가설사무실, 가설창고 등

계 약 액(도급액) : 709,642,900원 (관급비130,680,000, 이전비 37,595,000 별도)

계 약 자 : 류진산업(주) 대표 장혜자

감독기관 : 서울특별시 시설관리공단

발 주 자 : 서울특별시 강서도로사업소

	< 예산현황 >
▷예산배정: 973,052천원(도급비 818,063, 관급비 117,394, 이전비 37,595) ▷계약금액: 864,632천원(도급비 709,643, 관급비 117,394, 이전비 37,595) ▷변경금액: 966,009천원(도급비 717,156, 관급비 207,382, 이전비 41,471)

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

관련근거

- 공단 공사감독2처-11374호(2015.8.3) 및 시설보수과-6246(2015.8.11)

- 공단 공사감독2처-15739호(2015.10.5) 및 시설보수과-7815(2015.10.6)

- 공단 공사감독2처-16736호(2015.10.19) 및 시설보수과-8255(2015.10.21)

- 공단 공사감독2처-17958호(2015.11.5)

-  시설보수과-5065호(2015.7.3)

도급비 변경내용 : (증) 7,513천원

- 교면방수 및 포장물량 변경 : (증) 50,673천원

- 물끊기공, 치핑, 도색, 차선규제봉 물량 변경 : (감) 2,841천원

- 균열보수, 표면보수, 단면보수, 실링보수, 도장물량변경 : (감) 4,181천원

- 보험료 미사용에 따른 정산 : (감) 36,138천원

· 건강보험료         : 당초 4,979,943원 → 정산 0원

· 연금보험료         : 당초 7,294,152원 → 정산 0원

· 노인장기요양보험료 : 당초   326,186원 → 정산 0원

· 퇴직공제부금       : 당초 5,844,381원 → 709,642원

· 건설하도급대금     : 당초   361,321원 → 정산 0원

· 건설기계대여대금   : 당초 2,185,774원 → 정산 0원

· 안전관리비         : 당초16,528,857원 → 정산 4,687,550원

· 환경보전비         : 당초 4,014,687원 → 정산 0원

관급자재비(개질아스콘) 변경내용 : (증) 76,702천원

구 분	당 초		변 경		증・감		비고
	수량	금 액	수량	금 액
합 계	1,210	130,680,000	2,167	207,381,900	증)	76,701,900
서울교	1,210	130,680,000	1,941	185,753,700	증)	55,073,700	시설보수과-6246
일상유지	0	0	226	21,628,200	증)	21,628,200	시설보수과-5065

※ 일상유지보수공사 사용물량(226톤)에 대한 대금은 일상유지 예산에서 지급

이전비 변경내용 : (증) 3,876천원

- 폐기물처리 물량 변경 : (증)3,477천원

- 관급조달수수료 변경 :  (증)  399천원

공사비 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당초계약	준공(정산)	증・감		비고
총 공 사 비		877,917,900	944,267,620	증)	66,349,720
도급비	공급가액	645,129,910	651,960,000	증)	6,830,090	물량증․감 및 보험료감액
	부가가치세	64,512,990	65,196,000	증)	683,010
	계	709,642,900	717,156,000	증)	7,513,100
관 급 비		130,680,000	185,753,700	증)	55,073,700	물량증가
이 전 비		37,595,000	41,357,920	증)	3,762,920	폐기물처리비

※ 예산과목 : (2015예산) 도시개발특별회계, 도시안전실 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 서울교 보수공사, 시설비(401-01)

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

시설관리공단에서 현장실정보고사항에 대하여 기 승인처리한 내용을 반영 하고, 계약자가 납입확인서를 미제출한 보험료(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료 등)와 관급자재에 대한 실정보고사항을 반영하였음

설계변경(정산)계약 이후 준공검사(시설관리공단) 시행 요청

계약담당자(관리단속과) 준공대가 지급 요청

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.