서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(1회) 시행(강교 용접결함부재 보수공사)

안전총괄본부 교량안전과에서 시행중인 2015년 「강교 용접결함부재  보수공사(연간단가)」의 설계변경(1회)을 아래과 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 강교 용접결함부재 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2015.4.3. ~ 2015.12.30

다. 도 급 자 : ㈜제이더블유씨앤씨 대표 김정욱

라. 계약금액 : 372,955,750원

마. 변경사유(증·감 사유)

- 천호대교 맞대기용접부 보강에 따른 신규공종 발생

- 공사시행에 따른 공종별 물량증가 및 감소발생

- 기타, 수량변경 등

바. 예산과목 : 도시안전본부, 교량관리, 한강교량관리, 한강교량일상유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비.

사. 설계변경 내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증·감(원)	비 고
총공사비	372,955,750	431,959,000	증)59,003,250
도 급 비	372,955,750	431,959,000	증)59,003,250
이전비 및 기타	0	0	0

# 붙 임 1. 설계변경내역서 1부

2. 방침서 2부. 끝.

주무관	이우근		강구조교량팀장	류봉현		교량안전과장	11/06 이용심
협조자	★계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-4327	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울특별시 서소문별관 1동 2층	/
전화	2133-1961	/전송	2133-1429	/	cjsrp52@seoul.go.kr	/	대시민공개