문서번호	치수과-3804
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	11/06 박상돈
협조
	주무관		박정태

감리단 현안사항 검토 실정보고

- 한강공원 나들목 증설공사(신청담) -

2015. 11.

감리단 현안사항 검토 실정보고

- 한강공원 나들목 증설공사(신청담) -

강관에 부착하는 방수시트가 현재 점착복합시트로 설계되어 있고, 현장여건 및 부착성능 등을 고려 보다 우수한 개량아스팔트시트 방수로 개선하는 방안을 검토보고 드림.

▢ 공사개요

❍ 공 사 명 : 한강공원 나들목 증설공사(신청담)

❍ 공사기간 : '13. 4. 25 ~ '15. 12. 20

❍ 도 급 액 :  8,410백만원

❍ 공사규모 : 보행자전용 나들목 신설 (육갑문 및 E/V 2개소 설치)

( 폭 5m, 높이 3.5m, 길이 83.5m)

❍ 시 공 사 : 한양개발(주)

❍ 감 리 사 : ㈜동일기술공사, ㈜수성엔지니어링

❍ 위    치 : 강남구 청담동 영동대교 남단 하류

▢ 감리단 보고내용

❍ 관련근거 : 동감(신청담) 제15-67호(2015.10.29)

❍ 검토 배경

▶ 비개착공법(S.T.S)의 방수공사 시공시 당초 설계인 점착복합시트의 경우부착성능부족으로 시공시 방수시트 탈락 문제로 품질관리에 어려움이 있어 부착성능을 확보 품질관리 할 수 있는 개량아스팔트시트 방수를 변경검토하였음.

▢ 방수시트 변경 검토

❍ 변경(안) 비교

구 분	당 초		변 경
방 수 공 법	점착복합시트(2.5~3.0mm)		개량아스팔트시트(3.0~3.5mm)
	상 부(2.5mm)	벽체, 하부(3.0mm)	상 부(3.5mm)	벽체, 하부(3.0mm)
단 면 도
인증	∙특허제품		∙KS인증, Q인증
경제성	∙다소 고가(38,500원/㎡)		∙다소 저렴(28,500원/㎡)

❍ 공사비 검토

(단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
1. 개착구간 방수공사	100,475	90,844	-9,630
2. 비개착구간 방수공사	76,902	69,539	-7,362
3. 순공사비(계)	177,377	160,384	-16,992
4. 제경비(VAT포함)	64,222	75,615	11,392
도급액	241,600	236,000	-5,600

▢ 조치의견

❍ 감리단에서 검토된 바와 같이 비개착공법의 방수공사에 사용되는 방수시트는         현장 특성상 철판에 부착이 필수적이고 품질관리, 경제성에 유리한 개량아스팔트를        시공토록 변경함이 타당함

붙임 : 감리단 검토의견서 1부. 끝.