문서번호	급수운영과-19267
결재일자	2015.11.6.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	임인택	11/06 代김용현
협 조

준공기한 연기 보고(신설126,128,개량21)

명에 의거 2015년 석촌동외 11개동 상수도공사 담당업무 수행 중 아래와 같은 사유가 발생하여 급수공사 준공기한을 연기하고자 보고합니다.

1. 보고 요지 : 급수공사 준공기한 연기

2. 공사 현황

지시번호	공사위치	공사개요	당초 공사기간	변경 공사기간
신설-126	풍납동 231-41,42,43	D=50㎜, L=2m	2015.10.30~2015.11.06	2015.10.30~2015.11.30
신설-128	잠실동 304-14	D=50㎜, L=3m	2015.11.03~2015.11.09	2015.11.03~2015.11.30
개량-21	송파동 191 중대초교앞	D=700㎜ 유량계실 설치	2015.10.08~2015.11.09	2015.10.08~2015.11.30

3. 연기사유

- 신설-126,128 : 신축현장 공사지연(가설물 미철거)으로 급수공사 연기

- 개량-21 : 송파대로(가락시장 사거리) 굴착 관련 협의(주말 마라톤 대회로 굴착 불가) 및 전기, 통신선 매설 일정 협의후 유량계실 설치

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 조치내용

상기와 같은 사유로 급수공사일정 연기를 요청함에 따라 변경된 공사 기간을 거승건설㈜ 대표 한영주에게 통보코자 합니다.  끝.