투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	센트럴장교주식회사 대표이사
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 기간연장 승인 통보(을지로2가)

1. 센트럴장교 15-P1105-1(2015.11.5.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 요청한 교통안전시설 원인자부담공사 기간연장 건에 대하여 아래와 같이 승인하고 통보하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설(신호,표지) 원인자부담공사

나. 공사장소 : 중구 을지로2가 장교구역 4지구 주변

다. 원 인 자 : 센트럴장교㈜

라. 공사기간연장 승인내역

- 당 초 : 2014.9.15 ~ 2015.10.31

- 변 경 : 2014.9.15.~ 2015.12.31

(교통안전시설정보(TGIS)에 시설물정보 입력후 준공 요청)

마. 변경사유 : 토목공정 일정 변경에 따른 준공기한 연장.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	정성욱		주무관	代이한진		기전과장	11/06 김호성
협조자
시행	기전과-11721	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8396	/전송	02-300-8410	/	wook4125@seoul.go.kr	/	대시민공개