서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구 용역 준공기한 연기 의뢰

우리과에서 시행 중인 ‘마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구 용역’에 대하여 다음과 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 준공기한 연기

용 역 명	계약상대자	용역 준공기한		연 기 사 유
		당 초	변 경
마곡도시개발구역내 재처리수 공급 활성화 방안 연구	(재)한국지식산업연구원	2015.11.10	2015.12.30	추가 자료 분석 및 원가 재산정과 재처리수 사용자에 대한 추가 현장 조사가 필요하여 준공기한을 연기

2. 귀책사유 : 서울특별시(지체상금 미부과)

붙  임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부(별도송부) 1부. 끝.

	물순환정책과장
주무관	정수형		물재이용관리팀장	전기현		물순환정책과장	11/09 최진석
협조자
시행	물순환정책과-4302	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3852	/전송	02-2133-1041	/	jsh1019@seoul.go.kr	/	부분공개(5)