설계변경 심의 의견서

대시민공개

○ 공사명 : 2015년 길동배수지 외 2개소 항 청소용역

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사 김주경
제출 년월일	2015. 11. 9.

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2015. 11. 6.(금) 17:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

남정열

11/09

남정열

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

한호진

한호진

타당함

위    원

주무관

김희철

김희철

타당함

위    원

주무관

황대룡

황대룡

타당함

위    원

주무관

김효수

김효수

타당함

담    당

주무관

김주경

김주경

설계변경 사유서

□ 용역 현황

○ 용 역 명 : 2015년 길동배수지 외 2개소 항 청소용역

○ 용역개요 : 3개 배수지 항 청소면적 92,636㎡

○ 용역기간 : 2015. 4. 29. ~ 2015. 12. 31.

○ 용 역 비 : 당초 – 83,283,000원

변경 – 77,330,000원【감)5,953,000】

○ 계약상대자 : 태륭건영 대표 김윤희

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 보험료 정산

- 국민건강보험료 및 국민연금보험료의 실정산 : 감액

○ 설계변경 내역                                           (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
용 역 비	83,283,000	77,330,000	감) 5,953,000

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.