함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경에 따른 계약 의뢰(2015년 길동배수지외 2개소 항 청소용역)

우리사업소에서 시행하는 『2015년 길동배수지 외 2개소 항 청소용역』에 대하여

설계변경 심의를 완료하고, 아래와 같이 계약 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 길동배수지 외 2개소 항 청소용역

나. 용역개요 : 항 청소면적 ⇒ 92,636㎡(길동, 거마, 오금배수지)

다. 계 약 자 : 태륭건영 대표 김윤희

라. 계약기간 : 2015.04.29. ~ 2015.12.31.

마. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선교체비(기타교체비)-배수지 항청소

바. 설계변경 사유 : 국민건강보험료 및 국민연금보험료 등 감액

사. 설계변경 내역                                          (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증 ․ 감	비 고
용 역 비	83,283,000	77,330,000	(감)5,953,000

붙임 : 1. 설계변경 심의위원회 의견서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김주경		시설관리과장	11/09 남정열
협조자
시행	시설관리과-21374	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	대시민공개