문서번호	방재시설부-14996
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
박찬표		代이병환	11/09 임춘근
협 조

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(2차)」

예비준공검사 시행계획 보고

2015. 11.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(2차)」

예비준공검사 시행계획 보고

『신월 빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사(2차 계약분)』의 원활한 준공을 위해 건설기술진흥법시행령 및 건설사업관리 업무지침서 등 관련규정에 따른 예비준공검사 시행계획 검토보고임.

관련근거

○ 건설기술진흥법시행령 제78조(준공), 건설사업관리 업무지침서 제100조 (준공검사 등의 절차)

○ 수성신월 제15-318호(‘15.11.6) : 토목공사(2차) 예비준공 검사 요청

공사개요

○ 공 사 명 : 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사(2차)

○ 위    치 : 서울시 양천구 ~ 강서구 일원

○ 공사개요 : 저류배수터널 L=885.3m, D=10.0m

유도터널 및 횡갱 : L=227.6m, D=5.5m

수직구 6개소(유입 3, 환기 1, 유출 1, 유지 1)

○ 공사기간 : 2015.  1.  1 ~ 2015. 12. 31

○ 도 급 액 : 21,108백만원(공정율 76.22%)

○ 도 급 사 : 현대건설(주) 외 2개사

○ 감 리 사 : (주)수성엔지니어링 외 4개사

예비준공검사 시행개요

○ 일    시 : 2015. 11. 16.(월) 15:00

○ 장    소 :  신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 현장

○ 참 여 자

- 검사자 : 방재시설부 조양호 주무관, 노태학 주무관

- 입회자 : 기술지원기술자, 책임기술자

○ 준비사항(책임기술자) : 정산설계도서, 준공체크리스트

○ 예비준공검사 내용

- 준공 기한 내 준공가능 여부 및 미진 사항의 사전 보완

- 책임기술자가 확인한 정산설계도서, 준공체크리스트 등에 의한 검사

- 검사내용은 준공검사에 준하여 철저하게 시행

⦁준공된 공사가 설계서대로 시공되었는지 여부

⦁공사 시공시의 건설사업관리단에 비치된 제기록에 대한 검토

⦁지하 또는 기초부분의 시공확인과 주요 시공과정을 촬영한 사진 확인

⦁품질시험⦁검사 성과 총괄표 내용

⦁폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정성 여부

⦁책임기술자가 제출한 품질시험 검사 검토서 내용

⦁제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황

⦁기타 검사자가 인정하는 사항

※ 시공 후 매몰되어 사후검사가 곤란한 부분은 건설사업관리조서와 사전검사 등을 근거로 시행

향후계획

○ 예비준공검사 보완사항은 시공자에게 보완지시 및 준공검사시 확인할 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 검사결과 통보

○ 시공자는 보완사항을 조치완료하고, 책임건설사업관리기술자의  확인을 받은 후 준공 검사원 제출

붙임  책임기술자 예비준공검사원 제출서 1부. 끝.