문서번호	시설과-8184
결재일자	2015.11.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
남상국	김한준	11/09 이용태

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』   설계변경 (총차 1회, 1차 1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 11.

중부공원녹지사업소

(시  설  과)

『남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원조성공사 건설폐기물처리용역』

설계변경 (총차 1회, 1차 1회) 검토보고

「남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사 건설폐기물처리용역」과 관련, 책임건설사업관리기술자의 설계변경 보고가 접수되어 아래와 같이 보고드림.

□ 관련 근거

○ 한국건설관리공사 남산 회현 - 49호 (2015.11.2.) : 건설폐기물처리용역       설계변경서 제출

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 남산 회현자락 한양도성 보존.정비 및 공원 조성공사                  건설폐기물처리 용역

○ 용역내용 : 운반 1,353㎥, 처리 6,865톤 (1차 운반 669㎥, 처리 2,484톤)

○ 용역기간 : 2015.3.26 ~ 2016.12.31 (1차 3.26~2015.12.31)

○ 도 급 자 : 동광건설기계(운반) 대표 김철기, ㈜동우개발(처리) 대표 홍상표

○ 도 급 비 : 180,350천원 (1차 67,832천원)

□ 설계변경 보고내용

○ 변경사유

- 1차 공사의 건설페기물 처리물량 증가 및 건설폐재류 처리 물량  중량산출

오류에 따른 조정으로 인한 설계변경

○ 건설폐기물처리 변경내용

구 분			당 초	변 경	증 감	비 고
건 설 폐기물	총차	운 반	1,353㎥	2,132㎥	증) 779㎥
		처 리	6,865톤	5,028톤	감) 1,837톤
	1차	운 반	669㎥	1,887㎥	증) 1,218㎥
		처 리	2,484톤	4,452톤	증) 1,968톤
※ 1차분 처리물량 조정 및 건설폐재류 처리 수량 중량산출 오류로 정정 - 1차분 처리물량 증가 · 건설폐재류 45㎥, 폐아스콘 166㎥, 페콘크리트 1,007㎥ - 건설폐재류 처리 중량산출 오류 정정 · 3,986톤(면적 산출) → 291톤(체적 산출) 조정 (감 3,695톤)

○ 용역기간 및 계약금액 변경

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
용역기간	총 차	2015.03.26. ~ 2016.12.31	2015.03.26. ~ 2016.12.31	변경 없음
	1 차	2015.03.26. ~ 2015.12.31	2015.03.26. ~ 2015.12.31	변경 없음
계약금액	총 차	180,350,000	136,810,000	감)43,540,000
	1 차	67,832,000	121,283,000	증)53,451,000

□ 보고자 의견

○ 설계변경 보고에 대한 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 설계변경을 승인하고 계약변경을 시행하고자 함.

붙임 : 1) 건설폐기물처리용역 설계변경서 자료 제출 공문 1부.

2) 변경 설계서(총차 1회, 1차 1회) 각 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.