문서번호	방재안전시설부-555
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재안전시설부장
한종수		서관석	01/13 박종웅
협조

「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」

준공기한 연기 검토 보고

2014. 1.

도시기반시설본부

(방재안전시설부)

『합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」

준공기한 연기 검토 보고

○ 우리 본부에서 시행중인 「중동 빗물펌프장 증설공사」의 추가공사 시행(복공판 설치)에 따른 준공기한 연기 실정보고가 제출되어 검토 보고 드림.

1		관련근거

□ 공사감독1처-277호(‘14.1.10) : 【공사 준공기한 연기 신청에 따른 검토보고】

□ 방재안전시설부-2787호(‘13.11.11) : 【공사 용 부지 확보방안 검토 보고】

2		공사개요

□ 공 사 명 :「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정펌프장, 중동펌프장)

□ 공사기간 : ‘13. 1. 4 ~ '14. 9. 3(1차분 2014. 1. 17)

□ 도 급 비 : 4,478백만원(1차 1,170백만원)

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

3		추진경위

□ 2013.  1.  4 : 공사 착공

□ 2013.  8. 27 : 가시설(Sheet Pile) 착수

□ 2013. 10. 23 : 복공판 설치(12.8 설치 완료, 실 시공일 33일)

4		공단 검토 내용

□ 현 황

- 중동 빗물펌프장 공사장 부지 협소로 복공판 설치에 따른 준공기한 연기

□ 준공기한 변경(연장) 내용

구분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3	2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3	변경없음
1 차	2013. 1. 4 ~ 2014. 1. 17	2013. 1. 4 ~ 2014. 2. 7	증 21일

- 연장 사유

▷ 현장여건을 고려한 복공판 추가공사 시행에 따른 절대공기 부족

□ 공단감독 검토의견

- 공사장 부지 협소로 인한 복공판 설치는 불가피하며,

- 복공판 설치를 타 공종과 병행할 수 없는 실정으로 추가공기 산정은 적정하므로

- 실 작업일수(33일 소요) 범위 내 준공기한  연기는 적정 함(증 21일).

5		조치의견

□ 상기 공단 검토내용과 같이 준공기한 연기는 적정하다고 판단되는 바, 계약부서에 연기 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 공단 검토보고서 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝