함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(2015년 상수도관 전식방지공사)

우리사업소에서 시행하고 있는『2015년 상수도관 전식방지공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2015년 상수도관 전식방지공사

나. 계 약 자 : ㈜공항엔지니어링 대표 이은순

다. 공사기간 : 2015. 7. 13. ~ 2015. 11. 9.

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)                마. 설계변경 사유 : 계약물량 증감 및 신공정 발생

바. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	232,340,140	230,655,000	감) 1,685,140	감) 0.01%

붙임 1. 설계변경 계획서 및 변경내역서 각 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	정진호		기전팀장	문용욱		시설관리과장	이자원		강서수도사업소장	11/09 이상래
협조자	주무관	박현주
시행	시설관리과-23900	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-4016	/전송	02-3146-4039	/	hbtaegi@seoul.go.kr	/	대시민공개