투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시인재개발원
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결통보(공사, 다솜관 구조 보수보강공사)

1. 인재기획과-14255(2015.11. 5)호 관련입니다.

2. 다솜관 구조 보수보강공사 계약건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 통보합니다.

가. 계약건명 : 다솜관 구조 보수보강공사 변경계약

나. 계약상대자

******************************************

**********************************************************

다. 변경내용 : 설계변경

(단위:원)

계약금액		계약기간	**
당초	변경후
금40,669,200원	금38,523,100원 (감 2,146,100원)	2015.10.13.~11.6

라. 변경사유     : 현장실정을 반영한 공사물량 조정 설계변경

마. 변경계약일자 : 2015. 11. 6.

바. 사업담당     : 인재기획과 남성준 주무관.

붙 임 : 변경계약서류 1식.  끝.

주무관							백일선			시설재무팀장					박계완					인재기획과장					11/09 代최진경
협조자
시행			인재기획과-14353									(						)		접수											(						)
우	06756					서초구 남부순환로 340길 57번지															/			http://hrd.seoul.go.kr
전화		02 3488-2055						/전송			02 3488-2346					/	dshy@seoul.go.kr												/	부분공개(6,7)