투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	육림종합조경(주) 대표 노용주
(경유)
제목	설계변경 내역서 보완제출에 대한 회신

1. 관련문서

가. 육림20151105(2015.11.05.)호.

나. 육림20151106(2015.11.06.)호.

2. 귀 사에서 제출한 위 공문에 대한 검토 결과를 아래와 같이 회신합니다.

공 종	요청 사항	검토결과	사 유	비고
기계터파기	토사 → 암 변경	검토불가	암발생 수량 산출근거 없음 토질(품화암10:경질토10:사암80) 증빙자료 제출
되메우고다지기, 현장내 잔토처리	수량 일부 증감	검토불가	수량산출 근거 미비
소운반	현장 내 소운반 반영	검토불가	산출근거(평균왕복속도) 적용오류 보통적용: 본 현장은 운반로가 평탄*하고 다소 운반에 지장이 있는정도이며, 경사면은 수평거리로 환산적용 * 평탄지:보통의 야산
대나무휀스	토사 → 암 터파기, 되메우기	검토불가	암발생의 근거 및 수량 산출없음
	목재가공 및 설치 품 반영	미수용	목구조체 설치품 기 반영되어 있어 중복 적용 불가
팔각울타리	토사 → 암 터파기, 되메우기	검토불가	암발생의 근거 및 수량 산출없음

3. 아울러, 연습장휀스의 EX-메탈라스 및 고무판 설치건은 현장지시(2015.11.5.)대로 시공하시기 바랍니다.

	중부공원녹지사업소장
주무관	황윤채		조경팀장	남상국		시설과장	11/09 김한준
협조자
시행	시설과-8166	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 삼일대로 231, 중부공원녹지사업소 시설과	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5968	/전송	02-3783-5969	/		/	대시민공개