문서번호	설비부-370
결재일자	2014.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
배수웅	조예환	01/13 박기형

『IT-Complex 건립공사(일반전기공사 외 3개 공종)』

하도급 계약변경 검토 보고

2014. 1.

설  비  부

하도급 계약변경 검토 보고

IT Complex건립공사 4차 물가변동 및 공사기간 변경에 따른 하도급 변경 계약이 체결되어 이에 대한 감리단 실정보고 내용 검토 및 조치의견 보고임.

관련 공문

□ 감리단 실정보고

- 상암ITC감 제14-04(2014.01.08.) 하도급 변경계약 검토보고

: 일반전기공사, 정보통신공사, 소방전기공사, 무대조명 및 기계공사

□ 변경사유 : 원도급자 4차 물가변동 및 공사기간 변경에 따른 하도급 변경 계약

감리 실정보고 내용

□ 물가변동 적용 기간

업 체	4차 E/S기간	지수조정율	내용
원도급자 [대림산업(주)]	2011.03.31.~2012.02.29.	3.11%	원도급자와 하도급자간 계약기간에 의거 하도급자 물가변동에 따른 지수조정율 산정
하도급자 [세원전설(주)]	2011.03.31.~2012.02.29.	3.57%
하도급자[(주)한일티앤씨]	2011.10.14.~2012.02.29.	1.24%
하도급자 [대림아이엔에스(주)]	2011.10.14~2012.02.29	3.15%
하도급자 [(주)지에프에스]	2011.03.31.~2012.02.29.	2.73%

□ 하도급 물가변동에 따른 계약금액 변경

업 체	구 분	하도급할 금 액	하도급금액	증감금액	지수 조정율	하도급 비율	비 고
세원전설(주) -일반전기-	당 초	3,599,410,976	3,037,870,385			84.4%
	3차 변경	3,676,773,907	3,115,233,315	77,362,930	3.57%	84.7%
(주)한일티앤씨	당 초	1,885,408,118	1,623,600,000			86.1%
	1차 변경	1,905,540,318	1,643,732,200	20,132,200	1.24%	86.2%
세원전설(주) -정보통신-	당초	675,499,999원	577,291,564원			85.46%
	2차 변경	690,202,429원	591,993,993원	14,702,429원	3.57%	85.8%
대림아이엔에스(주)	당초	3,626,133,608원	3,018,885,100원			83.25%
	2차 변경	3,716,245,608원	3,108,997,100원	90,112,000원	3.15%	83.7%
세원전설(주) -소방전기-	당 초	394,364,213원	330,351,050원			83.8%
	3차 변경	402,391,152원	338,377,990원	8,026,940원	3.57%	84.1%
㈜지에프에스	당 초	1,116,319,336원	996,146,800원			89.2%
	3차 변경	1,123,200,936원	1,020,188,400원	24,041,600원	2.73%	90.8%

□ 공사기간 변경

업 체	당 초	1차 변경	2차 변경	3차 변경	비 고
세원전설(주)	‘10.05.10.~‘12.02.17.	‘10.05.10.~‘12.09.04.	‘10.05.10.~‘12.10.06.	‘10.05.10.~‘14.10.06.	원도급자 대림산업(주) 공사기간 변경
(주)한일티앤씨	‘11.10.14.~‘14.10.06.	‘11.10.14.~‘14.10.06.
세원전설(주)	‘10.05.10.~’12.09.04	‘10.05.10.~’12.10.06	‘10.05.10.~’14.10.06
대림아이엔에스(주)	‘10.12.22.~‘12.02.17	‘10.05.10.~’12.10.06	‘10.12.22.~’14.10.06
세원전설(주)	‘10.05.10~’12.02.17	‘10.05.10.~‘12.09.04	‘10.05.10.~‘12.10.06	‘12.10.06~’14.10.06
(주)지에프에스	‘10.06.21~’12.02.17	‘10.06.21~’12.09.04	‘10.06.21~’12.10.06	‘12.10.06~’14.10.06

□ 하도급 계약변경 통지

변경 계약일	통지일	비 고
2013. 12. 17.	2014. 01. 03.	건설산업기본법시행령 제32조 하도급 계약 후 30일 이내 통보

검토 및 조치의견

□ 검토의견

- 원도급자인 대림산업(주)의 4차 물가변동에 따른 하도급 업체와의 계약 변경사항으로 물가변동으로 인한 지수조정율 등 제반 서류 검토결과 적정함.

□ 조치사항

- 하도급 계약 변경 건에 대해 건설총괄부(건축부 참조)에 통보 조치

따로붙임   하도급 변경계약 기술검토서 각 1부(별도 첨부). 끝.