투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	한양도성 순성길 정비사업 폐기물처리용역 설계변경 시행

1. 녹지관리과-10640(2015.11.10)호와 관련입니다.

2.『한양도성 순성길 정비사업 폐기물 처리용역』에 대하여 다음과 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 한양도성 순성길 정비사업 폐기물처리용역

나. 용역기간 : 2015.09.14 ~ 11. 15

다. 도 급 자 : ㈜에스제이티(대표 강은숙)

라. 설계변경 내용 : 별첨 참조

마. 도급비 변경 내역 : 증3,044,000원

구 분		금 액			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		3,686,000	6,730,000	증3,044,000
도급비	소 계	3,686,000	6,730,000
	공급가액	3,350,910	6,118,182
	부가가치세	365,090	611,818

바. 예산과목 : 문화체육관광본부 한양도성도감, 한양도성보존관리활용, 한양도성보존정비, 한양도성탐방로조성및정비, 시설비및부대비, 시설비

첨 부 :  1. 관련 방침서

2. 변경내역서 1부.

3. 폐기물 물량 산출서 1부.  끝.

주무관	이은국		주무관	박병구		녹지관리과장	11/10 김윤철
협조자	재무팀장	代구혜선
시행	녹지관리과-10655	(		)	접수		(		)
우	04628	서울시 중구 삼일대로 231(예장동)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5948	/전송	02-3783-5949	/	jamijean@seoul.go.kr	/	대시민공개