부 장		11/10 김진팔		과 장	김정수	심사자	정삼기	설계자		김소연	설 계		심 사		결 재
											2015년11월10일		2015년11월10일
설 계 서
	용역명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(1차) - 설계변경(1차1회)
	구 분					금 액								비 고
						당 초			변 경			증 • 감
	총 용 역 비					330,000,000			282,300,000			감47,700,000
	용역비		공 급 가 액			296,690,910			253,805,456			감42,885,454
			부 가 가 치 세			29,669,090			25,380,544			감4,288,546
			용역손해배상공제료			3,640,000			3,114,000			감526,000
용역개요 : 1. 공사 개요 : 본선 개착470.8m, 차량기지입출고선 1,365m, 환기구 1개소 2. 과업 내용 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 (토목) 3. 과업 기간 0. 당 초 : 2015. 03. 13 ~ 2015. 11. 12. 0. 변 경 : 2015. 03. 13 ~ 2015. 12. 24.